투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시체육시설관리사업소
수신	(주)성준이앤씨 대표 이 후 옥
(경유)
제목	2014년 시설물유지보수공사(연간단가계약) 작업연기 지시

1. 시설개선과-4406(2014.7.7.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 공사 작업지시한 건 중 다음과 같은 사유로 공기연장 하니 공사기간 준수(아래 표 참조) 및 시설물유지보수에 만전을 기하여 주시기 바라며,

3. 작업 완료 후 준공 정산 내역과 공정(전,중,후)사진을 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 작업지시 변경개요

차수	작업지시(보수) 내용	수량	예상공사비 (단위:천원)	당초 작업기한	변경 작업기한	사유
계			30,572
12차	․ 주경기장 주변 우수배관 24개소 정비	1식	30,572	7.30	8.30	우천과 대관으로 인한 공기부족으로 작업 연장지시

끝.

	서울특별시체육시설관리사업소장
★주무관	오상호		시설개선과장	07/29 신동호
협조자	주무관	이상욱		주무관	우인식
시행	시설개선과-5295	(		)	접수		(		)
우	138-220	서울 송파구 잠실동 10번지 체육시설관리사업소 시설관리과	/
전화	02-2240-8818	/전송	02-2240-8777	/		/	대시민공개