투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)선진엔지니어링 종합건축사사무소 대표 전영성 귀하
(경유)
제목	실시설계용역 변경계약 요청

1. 선진 HP-14-108(2014. 7.18.)호와 관련입니다.

2. 귀 사와 계약 체결하여 시행중인「도시고속도로 연결램프(화랑로 진·출입)설치실시설계용역」에 대하여 아래와 같이 변경조치하였으니 재계약하여 주시기 바랍니다.

가. 용역명 : 도시고속도로 연결램프(화랑로 진·출입)설치실시설계용역

나. 준공기한 연기

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	2012.12.28 ~ 2014. 8.31	2012.12.28 ~ 2014.12.31
계약금액	547,000,000원	변경없슴

.끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이석근		토목설계과장	조성만		토목부장	07/29 노우성
협조자
시행	토목부-14586	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15(서소문동 37) 서울특별시청 서소문별관 2동 3층 도시기반시설본부 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개