함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(2013 관악 금천구 관내 상수도공사 건설폐기물 용역-최종)

1. 우리사업소에서 시행중인 「2013년 관악구 및 금천구 관내 상수도(송배수관정비, 시설물, 포장복구 등)공사 건설폐기물 처리 용역」 에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종) 시행 하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 2013년 관악구 및 금천구 관내 상수도(송배수관정비, 시설물, 포장복구 등)공사 건설폐기물 처리 용역(단가계약)

나. 용역개요

- 당초 : 폐기물운반 2,063㎡, 폐기물처리 2,966톤

- 변경 : 폐기물운반 1,640㎡, 폐기물처리 2,954톤

다. 용역기간 : 2013.07.04.~ 2014. 07. 30.

라. 계 약 자 : 마평산업개발㈜  대표 박병식

마. 설계변경  금액내용                                  (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증.감	비 고
총부기금액	79,622,000원	71,929,000원	감7,693,000원
1차수 금액	59,116,000원	59,116,000원	-	2013년 계약분
2차수 금액	20,506,000원	12,813,000원	감7,693,000원

바. 설계변경 사유 : 성상별 물량 증,감

사. 예산과목 : 자본적자출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(무라이닝관정비)

자본적자출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(간선배관공사)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(밸브류유지관리)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(송배수관정비)

따로붙임 : 1. 설계변경 심의 결과보고 및 합의서 각 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.   끝.

주무관	이철		급수설비팀장	김기상		급수운영과장	장시명		남부수도사업소장	07/29 전영석
협조자	주무관	정은희		행정지원과장	代김형국
시행	급수운영과-16943	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97(신대방동 470-11)	/
전화	02-3146-4545	/전송	02-3146-4589	/		/	대시민공개