투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경시행(2014년 동부2구역 교통신호기유지보수공사(연간단가)-1차)

1. 우리사업소에서 시행하는 『2014년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014.03.21. ～ 2015.02.28.

다. 도 급 자 : 주요이앤씨(주) 대표 박  영권

라. 설계변경 사유 : 감리단 건영본14-07-06호에 의거 설계변경

(물량 증감 및 내역변경에 따른 설계변경)

마. 설계변경내역                                    단위:원

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	309,391,845	421,810,000	증)112,418,155
부가가치세	30,939,185	42,181,000	증) 11,241,815
공 사 비	340,331,030	463,991,000	증)123,659,970

바. 예산과목 :  교통운영과, 도시교통체계 및 소통개선,  교통안전시설물관리,

교통신호기신설 및 보수, 시설비

별  첨 :  1. 변경설계서 1부.

2. 설계변경 보고서 1부.

3. 감리단보고서 1부.

4. 기타 1부.  끝.

★주무관	이귀섭		기전과장	김대진		동부도로사업소장	07/29 송상영
협조자	계약1팀장	김점선
시행	기전과-6165	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동 2번지)	/	www.seoul.go.kr
전화	2040-0361	/전송	2040-0365	/	lksoub@seoul.go.kr	/	대시민공개