투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	윤극영 반달할아버지집 리모델링공사 계약변경 의뢰

1. 도시기반시설본부 건축부-9304호(2014.07.28)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 추진중인「윤극영 반달할아버지집 리모델링공사」에 대하여 아래와 같이 계약변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 윤극영 반달할아버지집 리모델링공사

나. 대지위치 : 강북구 인수봉로 84길 5(수유동 566-26)

다. 건축규모 : 지상1층 99.8㎡

라. 공사기간 : ’14.05.01~’14.07.31

마. 계약금액 : 175,419,612원

바. 계 약 자 : ㈜큐에스엔지니어링 대표 조서구

사. 계약변경 현황

○ 변경사유

- 목구조 구조보강, 기존벽체보강,외부담장 보수후 도장등 변경

○ 계약금액 변경내용                                      (단위:원)

구 분	계약금액(당초)	계약금액(변경)	증 감	비 고
건축공사	175,419,612	191,919,612	증 16,500,000	금액변경

※ 예산과목 : 문화정책과, 문화도시서울구현, 문화향유공간 및 문화기반시설조성 미래유산보존 및 활용사업, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 신청서 1부.

3. 공사내역서(당초, 변경) 각 1부.  끝.

	건축부장
주무관	정호기		복지시설과장	조영수		건축부장	07/29 김우성
협조자	경리과장	최영미
시행	건축부-9335	(		)	접수		(		)
우	120-715	서울시 중구 덕수궁길 15 시청별관 2동 2층 건축부 서소문동 37	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2651	/전송	02-3708-2659	/		/	부분공개(7)