문서번호	기전과-6142
결재일자	2014.7.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	동부도로사업소장
이귀섭		김대진	07/29 송상영
협조

2014년 동부 2구역 교통신호기 유지보수공사

설 계 변 경  보 고(제1회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 7

동부도로사업소

(기전과)

2014년 동부 2구역 교통신호기 유지보수공사

설 계 변 경  보 고(제1회)

우리사업소에서 시행중인 2014년 동부 2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)의 작업지시 완료, 서울지방경찰청 규제 사항 이행 및 유지보수 물량증가에 따른 설계변경을 시행코자 함

		공 사 현 황

□ 공사명 : 2014년 동부 2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

□ 공사개요

- 교통신호시설(신호등, 제어기, 음향신호기, 잔여표시기 등)                              7,144개 유지관리

- 노후케이블 및 배관 교체공사 1식

- 서울지방경찰청 규제사항 이행 1식

- 민원사항(120, 응답소, 신호운영실 등) 처리 1식

- 기타 부대공사 1식

□ 공사기간 : 2014. 3. 21 ~ 2015. 2. 28

□ 계약금액 : 340,331,030원

□ 계약자 : 주요이앤씨(주)  박 영권

□ 책임감리원 : ㈜건영이앤씨  조순재

		설계변경 내용

□  책임감리원 건영본14-07-08호(2014. 7. 21)에 의거 현장               여건에 따른 물량변경 및 내역변경에 따른 설계변경 요청

(관련근거  1 ~ 4차 작업지시 완료 보고서)

작 업 지시번호	주요 작업지시 내용	작업완료 금액 (원)	비고
1차	봄맞이 교통신호기 환경정비 12개소	25,223,000
2차	장애인의 날 대비 음향신호기 45개소 정비 등	76,901,000
3차	한국전기안전공사 정기점검 지적사항 38개소 조치	40,645,000
4차	제어기 교체 8면 외 78개소 정비	133,716,000
5차	신호등 95면 철거(신호등 3개 → 2개 조정)	19,000,000	작업중
6차	작업지시예정	60,506,000
장래		108,000,000
계		463,991,000

		소요예산 : 123,660천원

- 2014년 교통신호기 신설 및 보수공사(시설비) 추가예산 배정 및           낙찰차액  사용[기전과-5700호(2014. 7. 9)보고

		변경내역

(단위 : 원)

구 분		변경전 금액	변경후 금액	증,(감)
공 사 비	재료비	195,032,193	151,986,842	감)43,045,351
	노무비	50,399,300	154,979,214	증)104,579,914
	경비	3,462,084	4,117,352	증) 655,268
	소계	248,893,577	311,083,408	증) 62,189,831
	제경비	91,437,453	152,907,592	증) 61,470,139
	계	340,331,030	463,991,000	증)123,659,970

		조치계획

- 상기와 같이  책임감리원 건영본14-07-08호(2014. 7. 21)에            의거  현장 여건에 따른 물량변경 및 내역변경에 따른 설계변경           시행코자 합니다

첨부 : 1. 감리단 설계변경 공문 사본 1부.

2. 변경설계서 1부.

3. 2014년 교통신호기분야 추가예산배정 및 낙찰차액 사용계획 1부. 끝.