투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)	공사감독1처장
제목	탄천1,2고가교 포장개량공사 사전검토보고서 제출에 따른 의견 회신

1. 공사감독1처-6678호(2014.7.25.)와 관련입니다.

2. “탄천1,2고가교 포장개량공사”의 현장조사 및 사전 설계검토보고서 제출사항에 대하여 아래와 같이 업무지시하오니 원활한 공사가 추진될 수 있도록 감독업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. “탄천1,2고가교 포장개량공사”의 설계도서 사전검토보고한 내용중 설계 오류, 착오, 물량의 증.감 사항에 대하여는 『공사계약일반조건』 『서울특별시공사계약특수조건』에 따라 현장여건 변동시에는 현장실정에 맞추어 설계변경 조치하여 주시고

나. 설계의 누락사항과 교통처리대책 심의후 교통안전시설 및 교통신호수 배치 등 설계변경이 추가 요구되는 사항에 대하여는 반영조치

다. 기타 설계 검토내용중 유공배수관의 직경이 시방서(10㎜)와 물량내역(20㎜)의 상이한 사항은 관련 지침과 현장여건을 고려하여 적용하고, 교면방수시 바탕면정리공 누락의견은 “콘크리트파쇄면 청소 및 버럭상차”공종에 포함되어 있음

라. 강성포장(램프F) 구간의 포장설계두께 t=5㎝와 현재 아스팔트 콘크리트 포장두께 상이에 따른 사항은 강성포장의 시.종점부에서 차량주행성 등을 고려한 종단구배 조정방안을 검토하여 시행바람.

3. 기타 본 공사의 예산 및 계약현황을 다음과 같이 통보하오니 『예산액(1,957,515천원)』 범위내에서 설계도서의 오류, 착오, 누락, 물량 증.감 및 관급자재, 폐기물처리 등 종합적 현장여건을 고려하여 개략 소요공사비를 산정후 설계변경 정산하고, 추후 실 공사착공전 설계변경 사항에 대하여 별도 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 예산집행 현황

세부 사업명	예 산 액	기 원인행위액	집행잔액	비 고
합 계	1,957,515,000	1,714,432,090	243,082,910	탄천1,2고가교 포장개량공사
탄천1고가교 보수 및 포장개량	957,515,000	714,432,090	243,082,910
탄천2고가교 보수 및 포장개량	1,000,000,000	1,000,000,000	0

나. 세부항목별 원인행위(계약)현황

세부 사업명	계약건명	계약자	원인행위액	비 고
합 계			1,714,432,000
탄천1고가교 보수 및 포장개량	- 탄천1,2고가교 포장개량공사 - 관급자재구매(아스콘) - 관급자재구매(도료) - 폐기물처리용역 - 교통처리대책 수립용역	기아건설(주) 서원아스콘 대동안전(주) (유)도성개발	501,607,000 155,766,590 9,343,580 20,795,500
	소 계		714,432,090
탄천2고가교 보수 및 포장개량	-탄천1,2고가교 포장개량공사	기아건설(주)	1,000,000,000

※ 계약건별 물량(산출)내역서는 기 통보(교량보수과-2760호, 2808호).   끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	나철흠		교량보수과장	07/29 김환겸
협조자
시행	교량보수과-2985	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 대치동 2번지	/
전화	02-2040-0382	/전송	02-2040-0308	/	cheolna@seoul.go.kr	/	대시민공개