투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰1

우리 사업소에서 시행중인「동작대교(도로교,철도교) 정밀안전진단용역」의

준공기한을 아래와 같이 연기의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 동작대교(도로교, 철도교) 정밀안전진단용역

나. 용역금액 : 금763,000,000원(변동없음)

다. 계 약 자 : 한국시설안전공단  대표 김정수

라. 준공기한 변경

- 당초 : 2013. 10.  4. ~ 2014. 07. 30.

- 변경 : 2013. 10.  4. ~ 2014. 09. 28.

마. 준공기한 연기사유 : 추가 과업지시에 따른 현장조사 및 검토 반영 등으로                                        준공기한 연기 필요

바. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 준공기한 연기 관련 서류 1부.  끝.

	교량보수과장
주무관	임동운		교량보수과장	07/30 이용재
협조자
시행	교량보수과-2240	(		)	접수		(		)
우	100-861	서울 영등포구 도림로 145(대림3동 711) 남부도로사업소 시설보수과	/
전화	3284-5469	/전송	836-3093	/	lduon@seoul.go.kr	/	대시민공개