문서번호	문화정책과-6549
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	문화시설팀장	문화정책과장	문화체육정책관		문화관광디자인본부장
박기철	이영미	정헌재	황치영		05/22 代황치영
협 조

평창동 문화복합시설 건립

타당성 조사 및 기본계획 수립용역 시행계획

2014. 5.

문화관광디자인본부

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	지방재정법, 건설기술관리법	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	종로구청	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

평창동 문화복합시설 건립

타당성 조사 및 기본계획 수립용역 시행계획

‘평창동 문화복합시설’ 건립 타당성 등을 종합적으로 연구․분석하여 기본계획 수립에 반영하기 위하여 전문연구기관을 선정하여 타당성조사 및 기본계획 수립 용역을 시행코자 함

□ 추진 필요성

❍ 평창동의 산재된 문화시설 활용을 극대화할 방안 검토가 필요

-  박물관, 미술관, 갤러리, 작가 작업실 등 산재됨

❍ 문화복합시설 건립을 요구하는 주민 및 단체의 민원 수용여부 검토

-  문화복합시설 건립 사업추진의 타당성 종합검토

□ 추진 경위

❍ ‘13.09.02 : 종로구 현장시장실

- 이종상 평창문화포럼 이사장 등 3인 차고지부지에 복합문화시설 건립요청

- 차고지를 포함한 평창동 지역의 문화공간화 사업구상 마련(종로구), 그 결과에 따라 차고지 활용방안 결정

❍ ‘14.03.24 : 평창아트밸리 조성사업 타당성조사용역 공고(종로구) - 유찰

❍ ‘14.04.16 : 평창아트밸리 조성사업 타당성조사용역 재공고(종로구) - 유찰

□ 관계 법령

❍ 건설기술관리법 제2조 3호 및 4호(기술용역)

- 건설공사에 관한 계획․조사․설계․설계감리 및 안전성 검토

❍ 지방재정법시행령 제41조 제2항(타당성조사)

- 사업비 500억원, 건축비 100억원 이상

❍ 행정안전부 고시 제2012-52호(2012.11.30)

- 지방자치단체의 공용 또는 공공용건물의 신축을 위한 타당성조사 전문기관의 자격요건

□ 용역개요

❍ 용 역 명 :「평창동 문화복합시설 건립」타당성 조사 및 기본계획 수립용역

❍ 용 역 비 : 30,000천원

❍ 용역기간 : 계약일로부터 5개월

❍ 계약방법 : 공개경쟁입찰

❍ 대지위치 : 종로구 평창문화로 101(평창동 148-16) 외8필지

❍ 부지면적 : 7,424㎡

❍ 부지현황 : 종로구 제설발진기지로 사용 중

- 도시계획 : 자동차정류장(‘79.6.26), 제1․2종일반주거지역, 역사문화미관지구 등

- 건물현황 : 지하1/지상2층, 연면적 910.88㎡  점포․사무실

□ 주요 과업내용

❍ 현황조사 및 분석

- 입지여건 조사, 국․내외 사례조사, 벤치마킹 등

- 지역주민 및 평창문화포럼 의견수렴

❍ 사업타당성 분석

- 사업내용의 타당성 분석

- 사업규모․사업기간․사업비 산출 및 적정성 분석

❍ 기본계획(안) 제시

- 건축기본방향 및 건물용도에 따른 스페이스 프로그램 등

❍ 결론 및 정책적 제안

- 결론 및 사업추진에 대한 정책적 제안

□ 소요예산

❍ ‘14년 예산액 : 30백만원

- 문화정책과, 문화도시 서울구현, 다양한 문화예술기반 확충, 문화향유공간 및 문화기반시설 조성, 문화복합시설 건립 및 공공부지 활용방안 연구, 시설비(100-401-01)

□ 향후일정(안)

❍ `14. 5월  :  기술용역 타당성심사(기술심사담당관)

❍ `14. 5월  :  용역 발주

❍ `14. 6~10월 :  타당성조사 및 기본계획 수립 용역 시행(5개월)

【붙임】  1. 과업내용서(안) 1부.

2. 사업부지 현황 1부.

3. 용역비 산출내용서(안) 1부.  끝.