문서번호	동물기획과-4762
결재일자	2014.6.19.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관	동물기획과장	동물원장	서울대공원장
김효준	김태원	노정래	06/19 안영노
협 조
	관리부장		정상택
	총무과장		이경로
	조경과장		이성주
	동물복지과장		이달주
	주무관		강경숙

- 백두산호랑이숲 전시물제작 -

설계변경 검토 보고

서울대공원

(동물기획과)

- 백두산호랑이숲 전시물 제작 -

설계변경 검토 보고

「백두산호랑이숲 전시물 제작 설치 공사」와 관련하여 추가사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경하고자 보고드림.

Ⅰ		사 업 개 요

1. 사 업 명 : 서울대공원 백두산호랑이숲 전시물 제작설치 공사

2. 계약 기간 : 2014. 3. 28 ～ 2014. 6. 20

3. 계약 금액 : 금147,000,000원

4. 사업 내용 : 전시물(설명패널, 체험물 등 전시시설 일체) 설치

5. 계약업체 : ㈜도둠디자인 대표 김명희

Ⅱ		설 계 변 경 검 토

1. 설계변경 사유

○ 제안서심사 결과 보고(동물기획과-2163,2014.311), 중간보고회 결과보고(메모보고, 2014.5.20.) 심사위원 의견에 따른 관람로 우측 녹지대 전시물 추가 제작

○ 고객 관람 만족도 및 사업 성과 향상을 위해 호랑이와 관련된 민속 문화적 요소를 공사에 반영.

○ 추가 전시물 제작에 따른 절대공기 부족으로 기간 연장이 필요함

2. 설계변경 내용

○ 호랑이 문화와 관련된 전시물 반영

- 호식총(산석(파석)쌓기, 시루 연출) 1개소

- 제3관람대 쉘터 기둥패턴(강사리범굿) 연출 12개

- 느티나무 고목주변 당산나무 연출(제사상, 밧줄 및 소지) 1개소

대상지	호식총(예)	기둥 패턴 연출_강사리범굿

○ 추가 전시물 제작에 소요되는 기간 연장(8일간)

4. 소요예산

○ 계약금액 변경 및 기간 연장

구분	당초	변경후	증 · 감
도급금액	147,000,000원	151,800,000원	증4,800,000원
계약기간	2014.3.28.~6.20	2014.3.28.~6.28	8일 연장

- 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민 만족도 향상, 다양한 축제 및 볼거리프로그램 운영, 동물전시프로그램 개발 운영, 시설비

Ⅲ		보 고 자 의 견

○ 위 보고한 바와 같이 본 공사에 대하여 설계변경 조치하고 보다 향상된  관람환경을 조성함으로써 시민 고객 만족도 향상

따로붙임 : 변경설계서 1부.  끝.