문서번호	하천관리과-11098
결재일자	2014.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	청계천관리팀장	하천관리과장		물관리정책과장
이병우	지세진	한유석		대결 07/08 배광환
협 조
	역사도심관리과장		이정화
	역사문화재과장		황요한
	생태복원팀장		안수연

「청계천 상류 지천 복원사업」

타당성조사 및 기본계획 용역 추진계획

2014. 07

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「청계천 상류 지천 복원사업」

타당성조사 및 기본계획 용역 추진계획

청계천시민위원회에서 ‘14.3.12 건의한『청계천 상류 지천복원 사업』에 대한「타당성조사 및 기본계획 용역」을 추진코자 함

□ 추진 근거

○ 2014. 3. 12 : 청계천시민위원회에서 기자설명회를 통해 청계천 개선보완 필요성을 서울시에 건의

□ 추진 배경

○ 청계천 역사성 및 자연생태성 회복 연구보고서 내용중 청계천 지천살리기 사업에서 청계천 상류 지천(백운동천,삼청동천)을 복원하여 종적, 횡적 연속성을 회복하여 하천의 생태성 향상을 건의

- 백운동천은 청계천의 원류로 지천인 옥류동천과 함께 인왕산에서 발원하고

있으나 복개되어 시각적으로 발원지를 복원 필요

- 삼청동천은 북악산에서 발원하여 삼청계곡 및 삼청공원 등 양호한 비오톱이

유지되고 있어 복원시 주변 생태계와 연결성 평가

○ 백운동천과 삼청동천은 역사문화적으로 의미 있는 하천으로 평가되어

복원이 필요한 것으로 평가

- 백운동천은 청계천의 발원지로서 조선시대 도성안 5대 경승중의 하나로 문화

유산적 가치가 높으며,

- 삼청동천은 청계천의 지천가운데 가장 규모가 컷으며 조선시대 중등교육기관

인 중부학당이 위치하던 지역인접 물길로서 중학천으로 불리기도 함

○ 백운동천과 삼청동천을 복원하여 인왕산과 북악산에서 청계천까지

물길을 연결하므로서 청계천의 자연성 회복이 요구됨

- 백운동천 과 삼청동천 복원을 통해 물순환과 유사공급이 가능한 청계천으로자연성 회복을 단계적으로 추진

□ 추진 경위

○ 청계천 개선·보완 선언(청계천 투어시 ‘12. 2. 28)

- 청계천의 역사성 및 생태성 개선·보완을 위해 청계천시민위원회 구성·운영

○ 청계천시민위원회 구성·논의(‘12. 3 ~ ‘14. 1월)

- 청계천시민위원회(전체회의11회, 3개 분과회의 각8회)에서 개선보완 방안논의

○ 청계천 개선보완 학술연구 용역추진(‘13. 3 ~ ‘14. 2월)

- 청계천 역사성 및 자연생태성 회복(청계천시민위원회 주관, 서울연구원 시행)

○ 청계천 역사성 및 자연생태성 회복 건의(청계천시민위원회, ‘14. 3. 12)

- 청계천시민위원회에서 자설명회를 통해 청계천 개선보완 필요사항을 서울시에 건의

○ 청계천 개선보완 마스터플랜 학술연구 용역결과 및 향후계획(부시장, ‘14. 4. 22)

- 청계천 본류구간 생태복원 : 기본 및 실시설계 추진

- 수표교 원위치 복원 및 지천 복원 : 타당성조사 추진

○ 기술용역 타당성심사 진행절차 변경 시행(기술심사담당관, ‘14. 6. 10)

- 서울연구원(공공투자관리센터) 우선 협의(외부기관 위탁시 사전검증절차 이행)

○ 타당성조사 과업내용 작성 및 서울연구원 사전 협의(‘14. 7. 08)

- 서울연구원(공공투자관리센터) 사전협의 결과 : 사업수행 불가

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 「청계천 상류 지천복원 사업」 타당성조사 및 기본계획 용역

○ 위    치 : 청계천 상류 지천( 삼청동천, 백운동천, 옥류동천)

- 폭 4 ~ 8m, 연장 6.1km

○ 용역기간 : 2014. 8 ~ 2015. 02월 (착수일로부터 210일)

○ 소요예산 : 193,340천원

- 2014년도 청계천 개선보완 사업 설계비(550,000천원)중 일부 사용

○ 예산과목 : 도시안전실 하천관리과, 치수 및 하천 관리, 하천 복원 및 정비,

청계천 개선보완 사업, 시설비(100-401-01), 설계비

○ 주요 과업 내용

청계천 상류 지천 복원사업 과업개요			현황(복개폭, 연장, 이용기능)
위 치	지천명	연장(m)
삼청공원입구~ 청계광장	삼청동천 (중학천)	L = 2,400	▣(5.0×2.0)~(2련×2.5×2.0), 2400m, 복개도로)
청운동 산1-1~ 청계광장	백운동천	L = 3,000	▣(2.0×1.5)~(2련×5.8×2.2), 2600m, 복개도로)
옥인동179-1 ~ 백운동천 합류점 (우리은행 앞)	옥류동천	L = 700	▣(1.5×1.5)~(2.0×2.0), 683m, 복개도로)

□ 용역 발주계획

○ 시행방법 : 기술용역 시행(타당성조사 및 기본계획)

○ 입찰방법 : 제한경쟁, 적격심사

○ 참가자격 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의거 다음 가), 나)의 자격을 갖준 업체

※ 자격의 상호 보완을 위해 2개업체 공동도급 허용: 분담이행방식

가. 엔지니어링산업진흥법」제21조 및 같은 법 시행령 제33조의 규정에 의거 입찰공고일 현재 산업통상자원부 건설부문건설부문[수자원개발(업종코드 3586), 상하수도(업종코드 3587), 도로공항(업종코드 3578), 교통(업종코드 3581), 도시계획(업종코드 3583), 조경(업종코드 3584)]의 엔지니어링 활동 주체로 신고를 필하고 해당기술자를 보유한 업체

나. 문화재수리 등에 관한 법률 제14조에 의한 문화재 실측 설계업(업종코드1121)으로   등록을 필한 업체

□ 향후 추진계획

○ 2014. 7월 중 : 기술용역 타당성심사 및 발주 공고의뢰

○ 2014. 7월 말 : 계약(지역제한 경쟁입찰, 적격심사)

○ 2014. 8 ~ 2015. 02월 : 용역시행

- 용역 진행 단계별 청계천시민위원회 보고 : 착수보고, 중간보고2, 최종보고

- 분야별 전문가 자문(수자원, 상하수도, 교통, 도시계획, 조경)

- 용역과정에서 관계기관(부서) 협의 : 서울시 및 자치구 관련부서

○ 2015. 2월 이후 : 용역결과에 따라 단계별 추진계획수립 시행

붙임 : 1) 과업내용서(안)

2) 산출내역서 1부.

3) 서울연구원 협의공문 1부.  끝.