투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	내부결재
(경유)
제목	『2014년 서울대공원 근교산등산로 정비공사』 설계변경 시행

1. 조경과-3900(2014.7.16.)호와 관련입니다.

2. 대공원 산림욕장 등산로 노후시설 등을 정비하는『2014년 서울대공원 근교산등산로 정비공사』의 설계변경을 아래와 같이 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 서울대공원 근교산등산로 정비공사

나. 공사내용 : 목교, 산막, 흙막이 설치 등

다. 공사기간 : 2014. 5. 26 ~ 7. 24

라. 도 급 액 : 금138,831,000원

마. 도 급 사 : 화성수원오산산림조합 대표 최만식

바. 변경내역

구 분	변경 전	변경 후	증 감	비고
도 급 액(원)	138,831,000	132,600,000	△6,231,000

사. 예산과목 : 푸른도시국 자연생태과, 생태계복원 및 보전과 야생동식물 보호, 생태계보전사업, 근교산등산로정비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 검토보고서 1부. 끝.

주무관	김성태		주무관	김흔진		조경과장	07/17 이성주
협조자	주무관	김희준		총무과장	이경로
시행	조경과-3906	(		)	접수		(		)
우	427-080	경기 과천시 막계동 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02-500-7542	/전송	02-500-7993	/	kst2006@seoul.go.kr	/	부분공개(7)