다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	(재)마리아수녀회 대표 정영숙 귀하
(경유)
제목	국고보조사업계획 변경 승인

1. 서울특별시 꿈나무마을 마회 14-1118, -1119(2014.7.29.)호와 관련입니다.

2. 2014. 아동복지시설 기능보강사업 추진관련, 낙찰차액 사용승인요청 사항에 대해서 「2014 아동분야 사업안내」 기준에 의거 다음과 같이 승인하오니 기능보강 사업추진 및 마무리에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 국고보조사업계획 변경 승인내용

(단위 : 천원)

사 업 내 용				승 인 내 역
사업명	지 원 예산액	집행액	낙찰차액	사용승인 낙찰차액	사용 범위 등
노란꿈터(남아숙사) 리모델링	2,400,000	1,907,143	492,857	492,857	- 설계도면 누락분 및 위치 변경에 따른 설계 변경 · 누 락 분 : 방재실, 기계실, 음악 치료실, 요리치료실 등 · 자재변경 : 소방용 백관 공사기간 : 2014.7.1.~12.21
영아전담 보호소 설치	800,000	655,535	144,465	144,465	- 설계도면 누락분 및 위치변경에 따른 설계 변경 · 누 락 분 : 통신공사 · 위치변경 : 급배수관, 난방배관, 냉난방시설 등

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김경래		복지팀장	홍우석		아동청소년담당관	전결 07/30 김영기
협조자
시행	아동청소년담당관-17641	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울 중구 세종대로 110 서울시청 5층 아동청소년담당관	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2133-5151	/전송	02-2133-0732	/	jyinman@seoul.go.kr	/	대시민공개