투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결 - 망원초록길 조성공사 건설폐기물 처리용역(4차)

1. 기전설비2과-3268(2014.7.29.)호와 관련입니다.

2.『망원초록길 조성공사 건설폐기물 처리용역(4차)』건에 대하여 다음과 같이 변경계약하고자 합니다.

가. 계약현황

계 약 명	계약업체	계약금액(원)	계약기간
망원초록길 조성공사 건설폐기물 처리용역(4차)	㈜도성개발 외 1	185,470,000	2014.3.12. ~ 6.30.

나. 변경내역                                             (단위 : 원)

구 분	변경 전	변경 후	비 고
계약금액	185,470,000	126,070,000	감59,400,000

다. 변경사유 : 망원초록길 조성공사 완료예정에 따른 물량정산 반영

붙  임 : 변경계약 요청 의뢰서 일체.  끝.

주무관	박신영		총무과장	최대봉		총무부장	07/31 서영관
협조자
시행	총무과-11602	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/	calla121@seoul.go.kr	/	부분공개(7)