문서번호	공원조성과-8983
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원디자인팀장	공원조성과장
임유미		代박미성	07/31 오순환
협조

2014 시유공원 내 테마놀이터 재조성

사업계획 변경 검토보고

2014. 7

푸른도시국

(공원조성과)

2014 시유공원 내 테마놀이터 재조성

사업계획 변경 검토보고

시유공원 내 테마놀이터 재조성 사업과 관련하여 용역보고회·자문회의 결과를 반영한 설계변경 및 대상지 선정 추가요구에 따라 아래와 같이 사업계획을 변경하여 시행하고자 함.

□ 2014년도 사업개요

○ 대 상 지 : 인왕산도시자연공원 어린이놀이터(홍제5) 등 6개소

○ 규    모 : 9,018㎡(6개소)

○ 사업기간 : 2014. 1 ~ 12

○ 사 업 비 : 2,206백만원(시설비 2,196, 시설부대비 10)

○ 사업내용

- 법적요건에 충족하도록 안전한 어린이 및 유아놀이시설 설치, 산책로, 휴게‧운동시설 등 편익시설 확충

- 테마가 있는 놀이터로 재조성하여 공원 내 장소성·기능성 부여

□ 추진경위

○ 2014. 2. 12. : 2014 시유공원 내 테마놀이터 재조성 계획 수립

○ 2014. 3 ~ 4 : 예산 재배정(설계비 84,324천원/6개소)

○ 2014. 4. 29. : 설계용역 중간보고회(5개소)

○ 2014. 6. 10. : 전문가 자문회의(5개소)

○ 2014. 7.	: 설계완료(5개소) 및 계약심사

※ 서초구 우면산 도시자연공원 내 어린이놀이터는 환경부에서 추진하는 ‘생태놀이터 조성사업(국비 30%, 시비 70%)’ 국비지원 대상지로 선정되어 별도 사업추진 중

□ 사업비 변경내용

○ 설계변경으로 인한 추가 예산 요청

(단위 : 천원)

연번	공원 및 놀이터명	사 업 비		증 감	요청사유
		변경전	변경후
	계	904,000	1,212,500	308,500
1	인왕산도시자연공원 어린이놀이터(쌈지)	300,000	400,000	100,000	화장실 설치
2	궁동근린공원 어린이놀이터	178,000	278,000	100,000	지형을 이용한 놀이시설 도입
3	계남근린공원 어린이놀이터(다락골)	300,000	319,200	19,200	〃
4	용왕산근린공원 어린이놀이터1	126,000	215,300	89,300	기능중심의 놀이시설 도입

○ 신규 대상지 예산 요청[구로구 공원녹지과-12160(2014.7.22.)]

연번	관리청	공원 및 놀이터명	위 치	면 적	사업비		요청사유
					요구액	배정액
1	구로구	고척근린공원 어린이놀이터	고척2동 산9-14	1,497㎡	267백만원	250백만원	안전기준 불충족

□ 검토의견

○ 설계용역 중간 보고회 및 전문가 자문회의 결과 테마 구현을 위한 적합한 놀이시설을 도입하며 발생한 설계변경으로 추가 예산 지원이 필요

○ 신규 대상지는 시공원 내 어린이놀이터로 안전기준에 불충족하여 ‘시유공원 내 테마놀이터 재조성’ 사업 조건에 부합하므로 추가 대상지로 적절

□ 향후계획

○ 2014년 예산 중 유보액(562백만원) 내에서 추가지원

○ 변경 내역을 해당 구청에 알림 및 계약심사 결과에 근거하여 예산 재배정

○ 시공원 내 어린이놀이터 중 안전기준에 미달된 대상지가 없도록 재조사

붙임 : 2014 시유공원 내 테마놀이터 재조성 사업비 변경(안) 1부.  끝.

【붙임】

2014 시유공원내 테마놀이터 재조성 사업비 변경(안)

(단위 : 천원)

연번	관리청	공원 및 놀이터명	위 치	면적 (㎡)	예 산		재배정 현황
					변경전	변경후 (증 감)	기배정	잔 액
계		6개소		10,515	2,206,000	2,206,000	84,324	2,121,676
1	서대문	인왕산도시자연공원 어린이놀이터(홍제5)	홍제동 산1-100	1,500	450,000	450,000	18,973	431,027
2		인왕산도시자연공원 어린이놀이터(쌈지)	홍제동 산1-1	1,620	300,000	400,000 (100,000)	16,086	383,914
3		궁동근린공원 어린이놀이터(시민)	연희동 188-42	711	178,000	278,000 (100,000)	11,217	266,783
4	양 천	계남근린공원 어린이놀이터(다락골)	신정3동 521	1,600	300,000	319,200 (19,200)	19,974	514,526
5		용왕산근린공원 어린이놀이터1	목2동 202-25	225	126,000	215,300 (89,300)
6	서 초	우면산도시자연공원 어린이놀이터	우면동 71	3,362	280,000	280,000	18,074	261,926
7	구 로	고척근린공원 어린이놀이터	고척2동 산9-14	1,497	-	250,000 (250,000)	0	250,000
기타(시설부대비)					10,000	10,000	0	10,000
유보액					562,000	3,500 (△558,500)	0	3,500