투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	한국철도공사 사장
(경유)	서울본부 시설처
제목	염천교 보수보강에 대한 안전감독비 납부현황 및 공사기간 연장 통보

1. 한국철도공사 시설처-5105(2013.10.8.)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행하는 “염천교 보수보강 및 강구조구간 재설치공사”에 대한 철도시설물 보호 및 차단작업 지원을 수행하는 안전감독비에 대하여 아래와 같이 납부하였으며,

3. 잔여공종 마무리를 위하여 공사기간은 2014.8.31.까지 연장하였음을 알려드리니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

▣ 납부현황

구분	요청금액	전회납부	금회납부
철도안전감독비	44,138,000	30,000,000	14,138,000

끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	이종욱		주무관	김지환		시설보수과장	07/31 신동헌
협조자
시행	시설보수과-5847	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 시설보수과	/
전화	300-8374	/전송	300-8384	/		/	대시민공개