투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	세다건설(주) 대표이사
(경유)
제목	작업지시 공사기한 연기(자동차-5호, 노량교)

1. 교량보수과-1841호(2014.6.26.)의 노량교 죠인트 유간청소 등 작업지시와 관련입니다.

2. 귀사와 계약체결하여 시행하고 있는 『2014. 자동차전용도로시설물 일상유지보수공사-남부』의 작업지시(자동차-5호, 노량교)의 작업기간을 아래와 같이 연장승인하오니 작업시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 작업기간 연장승인 내용

당 초	2014. 6. 27 ~ 2014. 7. 26
변 경	2014. 6. 27 ~ 2014. 8. 08

나. 연장사유 : 교량하부 교각상부의 협소(점검통로) 및 잦은 우천으로 인하여 공사의 진척이 미진한 관계 등으로 작업기간을 연장

붙임 : 1) 작업기간 연장요청 공문서 1부. 끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
★주무관	차식환		교량보수과장	07/31 이용재
협조자
시행	교량보수과-2255	(		)	접수		(		)
우	150-070	서울 영등포구 도림로 145(대림동 711)	/
전화	02)3284-5436	/전송	02)3284-5404	/	csh1137@seoul.go.kr	/	대시민공개