문서번호	건축부-9465
결재일자	2014.7.31.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정재흥		조영수	07/31 김우성
협조

『송정사근 빗물펌프장 증설공사』

설계변경자문 소위원회 지적사항 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.07.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「송정사근 빗물펌프장 증설공사」

설계변경자문 소위원회 지적사항 조치결과 보고

「송정사근 빗물펌프장 증설공사」와 관련 서울특별시시설관리공단(감독업무)으로부터 제출된 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 지적사항에 대한 조치결과 보고

1		검토근거

○ 건축부-7995호(‘14.07.01) : 설계변경자문 소위원회 자문(결정)내용 알림

○ 서울특별시시설관리공단 공사감독2처-12270호(‘14.07.29) : 설계변경

소위원회 자문내용 조치결과 제출

2		검토보고 내용

○ 검토보고 사유

- 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 계단난간에 대한 재질 및 규격이 도면에        표기가 되어 있지 않으므로 도면에 표기 등 지적사항에 대한 조치결과 보고서가         서울특별시시설관리공단(감독)으로부터 제출됨

○ 설계변경자문 소위원회 자문(결정)결과 조치 내역 : 별첨

3		감리원 검토의견

○ 송정사근 빗물펌프장 증설공사의 설계변경 자문회의 결정사항을 수용,              당초 자문 요청금액에서 7,251천원 감액 조치함

○ 공사비 검토결과(제경비 포함)

- 설계변경자문 요청 금액 : 229,443천원

- 설계변경자문 지적사항 보완 금액 : 222,192천원

- 증감액 : 감 7,251천원

4		처리의견

○ 서울특별시시설관리공단(감독)의 검토의견과 같이 설계변경 자문(결정)결과 지적       사항 조치이행 등 보고사항이 적정하므로 동 내용을 승인처리하고, 향후 설계       변경토록 서울특별시시설관리공단에게 통보하고자 함

첨부 서울특별시시설관리공단 서류 1부.  끝.