문서번호	시설보수과-3018
결재일자	2014.7.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설보수과장		동부도로사업소장
이민호	김호규	박용선		07/31 송상영
협 조

2014년 성내교보수공사 발주 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  7.

동 부 도 로 사 업 소

시 설 보 수 과

2014년 성내교보수공사 발주 검토 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 2종 시설물인 성내교에 대해 시설물 보수를 위해 예산(5억원)이 책정되어 단위사업 시행을 위한 검토보고임.

	1		시설물 개요

위    치 : 송파구 풍납동 361

시설규모 : 폭 40m(구교20m, 신교20m), 연장 120m, 2종 시설물

시설구조

․ 상부구조 : PSC거더(구교 단경간, 신교 연속경간)

․ 하부구조 : 각주식 라멘형

설계하중 : DB-18

준공연도 : 1972년(구교), 1980년(신교)

	2		2013년 보수이력 및 2014년 예산배정 내용

2013년 성내교 보수이력

○ 성내교는 2013년 8억원의 예산이 배정되어 단위사업으로 시행

- 공 사 명 : 성내교 보수공사

- 공사기간 : 2013. 10. 11 ~ 2013. 12. 26

- 공 사 비 : 766백만원(도급비 699백만원, 관급비 67백만원)

- 주요공종

․ 아스팔트 교면포장 3,041㎡, 보도부 칼라포장 628㎡

․ 보차도 경계 연석 보수공 186㎡, 중앙분리대 보수 50m

․ 교량하부 콘크리트 표면보수 875㎡

2014년 예산 배정 내용

○ 예산배정액 : 5억원

○ 예산배정 내용 : 신축이음장치 96m 교체, 보도포장 14a, 균열보수등

- 신축이음장치 96m 163백만원

- 보도포장 14a 300백만원

- 균열보수, 단면보수 37백만원

	3		보 고 내 용

○ 2014년 성내교 보수대상 중 불필요한 공종 발생 : 신축이음장치, 보도포장

- 신축이음장치(163백만원) : 2013년 정밀점검용역결과 기능상 문제가 없음

- 보도포장(300백만원) : 2013년 성내교보수공사에서 낙찰차액활용 기시행

○ 2013년 정밀점검용역 결과 추가 보수대상 발생 : 교량받침 교체

- 용역기간 : 2013. 6. 7 ~ 2014. 1. 17

- 용역결과 내용 : 교량받침 90개 교체(교량받침 C등급)

․ 플레이트 및 기초 콘크리트 탈락등 중요손상 교체: 5개

․ 플레이트부식, 받침몰탈 박리 및 파손, 피봇 및 롤러받침 교체 : 70개

․ 고정볼트 체결불량, 볼트길이 부족 : 15개

- 교량받침 교체에 따른 예산소요액 : 460백만원

	4		조 치 방 안

○ 기 시행된 공종(보도정비) 및 불필요한 공종(신축이음장치 교체)은 금회 설계에서 제외

○ 추가보수대상공종(교량받침교체)는 2014년 예산으로 설계에 반영하여 시행  끝.