문서번호	설비부-8497
결재일자	2014.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
이동기	代정광식	08/01 박기형

『경춘선 폐선부지 공원조성 전기공사(1차)』

준공(납품)기한 연기요청 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.  8.

『경춘선 폐선부지 공원조성 전기공사(1차)』

준공(납품)기한 연기요청 검토보고

『경춘선 폐선부지 공원조성 전기공사(1차)』관련 책임감리원으로부터 선행 토목·조경공사 지연으로 인한 전기공사 준공(납품)기한 연기요청에 대한 검토 보고임.

공사개요

❍ 공사명 : 경춘선 폐선부지 공원조성 전기공사

❍ 위  치 : 노원구 공릉동 공덕제2철도 건널목~육사삼거리

❍ 규  모

- 전기용량 : 분전반 4면, 공원등 90본

- 전기공사 : 동력,제어,계측 배관·배선

❍ 공사기간 : 총차 13.10.10 ~ 15.01.09.

1차  13.10.10 ~ 14.08.09.

❍ 총사업비   총차 174,894,950원

1차 174,894,950원

❍ 시공사 : 시대전기(주), 대표 김정숙

❍ 감리사 : 유신(주)

관련근거

❍ 준공기한 연장 검토보고 - 감리단

- 경의경춘(감) 제2014-417(2014.07.25)

감리단 검토의견

❍ 연기사유 : “경춘선 폐선부지 공원조성공사” 기본 구상안 변경에 따른 전 구간 보안 설계중으로 선행 공정인 토목/조경공사가 지연되고 있어 후속 공정인 전기공사 추진이 불가함에 따라 토목/조경공사에 맞추어 공사기간을 연장하여 공사를 추진 하고자 함.

❍ 준공(납품)기한 연기

구 분		당초 준공 (납품) 기한	변경 준공 (납품) 기한	비 고
공사 기간	총차	‘2015.01.09	변동없음.	-
	금회(1차)	‘2014.08.09	‘15.01.09	5개월(증)
공사 금액	총차	174,894,950원	변동없음.	-
	금회(1차)	174,894,950원	변동없음.	-

❍ 지체지상급 부과여부 : 미부과

검토의견

❍ 감리단의 검토의견과 같이 선행공정 일정에 맞추어 원활한 공사가 추진될 수 있도록 전기공사 준공(납품)기한 연기를 위해 재무과로 계약변경의뢰 요청하고자 함.

따로붙임 : 감리단 준공(납품)기한 연기요청 보고서 1부.   끝.