문서번호	여의도공원관리사무소-5233
결재일자	2014.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	여의도공원관리사무소장	서부공원녹지사업소장
이대호	김희태	박원근	08/01 안해칠
협 조

여의도공원 화장실 건물 옥상방수 추진계획

2014. 8

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

여의도공원 화장실 건물 옥상방수 추진계획

여의도공원내 6호화장실의 현미경교실 등이 누수되어 감전사고 위험 등 안전사고 발생이 우려될 뿐 아니라, 프로그램 운영 등에 어려움이 있어 옥상방수공사 및 물홈통공사를 아래와 같이 시행하고자 함

화장실 건물 옥상방수공사 개요

○ 위    치 : 여의도공원 6호화장실 옥상, 1호화장실 좌측 물홈통

○ 면    적 : 240㎡ / 물홈통 3개소

○ 공사내용 : 기존 싱글 ․ 물홈통 철거, 방수 후 재설치

○ 공사기간 : ’14. 8 ~ 8. 31

○ 소요예산 : 20,600천원

추진방법

○ 계약방법 : 소요금액이 소액이고 이용불편사항의 조기해소 등을 위해 관련 전문 시공업체 중 시공경험이 풍부하고 견적가가 저렴한 업체와 수의계약(지방계약법 시행령 제26조)

○ 하자담보기간 : 준공일로부터 1년

○ 예산과목 : 서부공원녹지사업소 공원운영과, 세계적인 환경생태 테마공원육성, 여의도공원유지관리 시설비 및 부대비, 시설비

추진일정

○ ’14. 8.   : 추진계획 수립

○ ’14. 8. 7 ~ 8. 13 : 계약 및 착공

○ ’14. 8. 14 ~ 8. 20 : 기존싱글 철거

○ ’14. 8. 21 ~ 8. 31 : 방수 및 지붕싱글 재설치(물홈통공사 포함)

○ ’14. 9. 1 : 준공

첨부 : 건물누수 현황사진 1부.  끝.