문서번호	시설보수과-3176
결재일자	2014.8.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
정규용		08/01 김찬구
협 조
	주무관			정성오

도로시설물 긴급보수관련 폐기물처리계획

[2014년 도로시설물보수공사 건설폐기물 처리용역]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 07.

남부도로사업소

시설보수과

도로시설물 긴급보수관련 폐기물 처리계획

우리사업소에서 유지관리하는 관내 도로시설물내 직영반 작업시 발생된 준설토 등 폐기물을「2014년 도로시설물보수공사 건설폐기물처리용역」에 반영하여 처리하고자 합니다

용역개요

○ 용 역 명 : 2014년 도로시설물보수공사 건설폐기물 처리용역

○ 용역기간 : 2014. 7. 29 ~ 2015. 2. 28

○ 용 역 비 : 88,178,000원

○ 용역개요 : 폐기물운반 1,630톤, 폐기물처리 3,815톤

○ 도 급 자 : 금강환경산업㈜ 대표 박기선

실정보고 근거

○ 도로시설물 유지관리를 위한 직영반 작업시 발생된 폐기물처리

실정보고 내용

○ 도로시설물내 시설물보수 등 작업시 발생된 각종 혼합 폐기물발생물

및 청사내 공사,청소시 발생 잔재물이 청사내에 적치되어 있어 긴급

반출처리가 필요한 실정

○ 처리물량 : 혼합폐기물 약 10톤

- 폐콘크리트,준설토사,폐비닐․낙엽․쓰레기 등 각종 혼합폐기물

위치 : 직원대기실앞 내용 : 준설토 등 각종 혼합폐기물

검토내용

○ 도로시설물내 작업시 발생된 준설토,비닐,프라스틱 등 각종 폐기물이 혼합되어 종류별로 분류하기가 곤란하므로

○ 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」시행령 제2조의 (별표 1)에 의거 혼합폐기물로 처리코자 하며

○ 처리물량은 실제 계근량에 따라 별도 정산이 필요함

○ 소요예산 : 약 1,500,000원

- 약30톤 × 50,000원/톤 = 1,500,000원

조치계획

○ 도로시설물내 직영반작업시 발생된 준설토 등 청사내 적치된 폐기물을 제거하여 청사 및 직원근무환경을 개선하기 위해  “2014년 도로시설물보수공사 건설폐기물 처리용역”업체에 긴급 지시하고자 합니다

○ 처리물량은 실제 계근량에 따라 별도 정산후 추후 설계변경 시행

끝.