투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	준공(납품)기한 연기요청(경춘선 폐선부지 공원조성 전기,통신공사)

우리 본부에서 시행 중인 『경춘선 폐선부지 공원조성 건설공사』와 관련 선행 토목 및 조경 공정이 지연됨에 따라 원활한 공사추진을 위해 아래와 같이 전기·통신공사 준공(납품)기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공사명 : 경춘선 폐선부지 공원조성 전기·통신공사

2.준공(납품)기한 연기요청현황

공 종	계약자	당초 준공 (납품) 기한		변경 준공 (납품) 기한		비 고
전기공사	시대전기(주)	총차	15.01.09	총차	15.01.09	변동없음.
		1차	14.08.09	1차	15.01.09	(증)153일
통신공사	아산정보통신(주)	총차	15.01.09	총차	15.01.09	변동없음.
		1차	14.08.09	1차	14.12.09	(증)122일.

3. 연기사유 : 선행 공종 지연으로 설치시기 미도래

4. 지체상금 : 미부과

따로붙임 : 1. 준공(납품)기한 연기요청 검토 보고서 각 1부.

2. 준공(납품)기한 연기요청 공문        각 1부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),건설총괄부장
주무관	이동기		건축설비과장	代정광식		설비부장	08/01 박기형
협조자
시행	설비부-8503	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8630	/전송	02-3708-8659	/	ilovey2@seoul.go.kr	/	대시민공개