투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	설비부장
(경유)
제목	물품계약서 송부(장충체육관 기계설비공사-무대기계장치 구매)

1. 설비부-8448(2014.7.31.)호와 관련입니다.

2. 귀 부서의 조달계약물품 납품기한 연기 요청건에 대해 다음과 같이 변경계약체결되어 물품계약서를 송부하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 장충체육관 리모델링공사 무대기계장치 구매

나. 변경계약체결 현황

구 분	당 초	변 경	비 고
계 약 자	한국기계공업(협)연합회 (대표자 ***)	변경없음
계약금액	226,500,000원	변경없음
납품기한	2014. 8. 31	2014. 12. 31.

붙임 : 물품계약서 1부.  끝.

	건설총괄부장
주무관	조성익		경리과장	최영미		건설총괄부장	08/01 강홍기
협조자
시행	건설총괄부-14052	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관2동3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3708-2327	/		/	부분공개(6)