문서번호	정수시설과-1513
결재일자	2014.8.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
양영민		代양영민	08/01 박기석
협 조
	정수과장			임건혁

- 송수펌프동외 4개소 -

공정감시제어반 설치 작업계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.8

강북아리수정수센터

(정수시설과)

- 송수펌프동 외 4개소 -

공정감시제어반 설치 작업계획

송수펌프동 외 4개소 공정감시제어반 제작설치건과 관련 작업 진행시

어려움이 예상되어 생산공정에 지장이 없도록 추진하고자 세부 작업계획을

보고 드림.

❏ 사업개요

❍ 건    명 : 송수펌프동외 4개소 공정감시제어반 제작설치

❍ 계 약 사 : ㈜ 위켄시스 대표 조대현

❍ 계약기간 : 2014.4.16.~2014.9.12.(150일)

❏ 사업내용

❍ 정수장 공정감시제어시스템 네트워크를 간소화하여 제어신호 부하량를 감소시켜 시스템을 최적화하므로서 유지관리 효율성 제고

❍ 기존의 노후된 모자이크 보드(MGB)등을 철거후 시스템을 간단하게 정비

❏ 작업계획

❍ 위치별 작업일정

위 치	여과지1,2계열	약품동1.2계열	여과지3,4계열	약품동3,4계열	송수펌프동
일 정	8.4～8.5	8.6～8.10	8.11～8.12	8.13～8.14	8.15～8.26

❍ 사전 준비작업

- 여과지 작업 예상시간이 48시간 소요되므로 사전 역세척 실시

- 침전지, 여과지 수질 데이터 Scan Off

- 여과수 유량데이터 Line 임시결선

- 정수지 잔류염소 데이터 Line 임시결선

❍ 작업순서

- 기존판넬 철거 → 신설판넬 설치 → 케이블 결선 → 시운전

❏ 작업추진 방안

❍ 작업 추진시 현장 수동운전 등 어려움이 예상되므로 정수과 제어실

근무자와 긴밀한 협조체제를 유지하면서 작업을 추진코자 함.

첨부 : 세부 공정계획표 1부.끝.