문서번호	녹색에너지과-14913
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		햇빛발전팀장	녹색에너지과장
김동호		이재성	08/04 권민
협조

공동주택에 설치 가능한 가정용 미니태양광

기술개발용역 준공기한 연기 검토 보고

2014. 8

서울특별시 기후환경본부

(녹색에너지과)

기술개발용역 준공기한 연기 검토 보고

「공동주택에 설치 가능한 가정용 미니태양광 가전제품화 기술개발용역」의 내실있는 과업 수행을 위하여 준공기한을 연기하고자 함

□ 용역개요

○ 계 약 명 : 공동주택에 설치 가능한 가정용 미니태양광 가전제품화 기술개발용역

○ 과업기간 : 2014. 2. 5 ~ 2014. 8. 6(6개월)

○ 계약업체 : 한솔테크닉스(주) 대표 이성용

○ 계약금액 : 금90,000,000원(금구천만원)

□ 준공기한 연기

○ 연기사유

- 제품의 개발 및 공인인증(시험)기관 인증(시험)결과 장기간 소요

- 미니태양광 보급사업의 문제점 및 개선방향 제시 필요

- 미니태양광 참여기업 제품(6종)에 대한 모니터링 필요

- 내실있는 과업수행을 위하여 과업기간(6개월) 부족

○ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시

○ 준공기한 연기기한 : 2014. 8. 6 ~ 2014. 12. 31

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

□ 조치사항

○ 위 용역 준공기한 변경사항을 재무과에 통보하여 변경계약 추진