문서번호	정수시설과-1688
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	정수시설과장
유재진		민태식	08/04 김창현
협조
	주무관		지동성

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

2014년 광암아리수 정수센터

전기설비 유지보수 연간단가공사 추진현황 보고(2차)

2014. 08.

서울특별시 광암아리수정수센터

(정수시설과)

2014년도 광암아리수정수센터

전기설비 유지보수 연간단가공사 추진현황 보고(2차)

우리 정수센터에서 시행 중인 “2014년 광암아리수 정수센터 전기설비 유지보수 연간단가공사”추진중 사정변경 사항이 발생하여 다음과 설계변경하여 시행하고자함.

Ⅰ				공사개요

공 사 명 : 2014년 광암아리수정수센터 전기설비 유지보수 공사

공사기간 : 2014. 05. 30. ~ 2014. 12. 20.

공사내용 : 중계펌프장 압력전송기 설치, 배전반 SPD 설치, 가성소다 조작제어반 교체, 탈수기동 현장조작판넬 교체, 관사 정문 CCTV 설치

총사업비 : 금46,831,020원(금사천육백팔십삼만일천이십원)

시공업체 : 범진성업(주) 최병권

Ⅱ				추진상의 문제점

관사정문 CCTV 설치위치 변경에 따른 수량 증가

- 당초 이동형 카메라 1개소를 설치코자 하였으나 관사 입주자대표 및 입주민이 고정형 2개소로 요구하여 수량변경 발생

관사정문 CCTV 설치위치 변경에 따른 기종변경

- 고정형 카메라 2개소 설치에 따른 이동형 카메라 기종[당초 ptz[회전(pan), 기울기(tilt), 확대(zoom) 기능)]을 고정형 일반기능으로 기종변경 필요

Ⅲ				개선방안 및 조치의견

관사 정문 CCTV 기종변경

○ 기존 CCTV : HD급 이상, 0.0001LUX이상, IP방식, PTZ기능 지원, 12배줌

○ 변경 CCTV : Full HD급, 0LUX이상(IR LED ON), 야간가시거리 30M, IP방식  PTZ기능 미지원, 2.8배줌

○ 변경 전후 CCTV 모습

기 존	변 경

○ PTZ 기능이란 : P(Pan 회전), T(Tilt 기울기), Z(Zoom 확대)를 말함

관사 정문 CCTV 수량변경(1개소 → 2개소)

- 기존 PTZ 기능이 있는 CCTV 1대를 PTZ기능이 없는 고정형 CCTV를 2대 설치하여 위치별 정확한 감시가 가능하도록 하고자함.

변경전 CCTV 설치 위치

변경후 CCTV 감시 위치

도급공사비 설계변경 내용(증70,000원)

공 종	변 경 내 용	공 사 비 (단위:천원)
		당 초	변 경	증 감
관사정문 CCTV 설치	PTZ용 CCTV	2,108	0	-2,108
	고정형 CCTV	0	1,919	1,919
	카메라 폴 기초대	222	444	222
	설치비	36	73	37
합 계		2,366	2,436	70

설계변경 내용과 같이 우선 시공하고 추후 설계변경 반영하여 정산 조치하고자 함.

Ⅳ				행정사항

관사CCTV설치 관련 3차 작업지시 시행

전반적인 변경사항 설계변경 시행

계약변경 및 정산처리. 끝.