문서번호	시설과-5455
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
박도복	이재복	함석주	08/04 代김준현
협 조

『2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가)』 작업지시(4차)완료보고

중부공원녹지사업소

시설과

남산공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가)

작업지시(4차) 완료보고

남산공원 전기시설물 유지보수공사(연간단가) 4차 작업지시사항에 대한 작업결과를 아래와 같이 보고합니다.

▢ 관련근거

○ 시설과-4917호(2014. 7.14) : 제 4차 작업지시

▢ 공사개요

○ 공사명 : 2014년 전기설비 유지보수공사(연간단가)

○ 도급자 : 해주전설 (대표 : 구대원)

○ 공사금액 : ₩131,181,680원

○ 공사규모 : 노후 공원등, 케이블 및 분전반 설비 정비 등

▢ 4차 작업지시 사항 및 작업 결과

○ 대 상 : 제 4차 작업지시분

○ 기 간 : 2014. 7. 14 ~ 2014. 8. 4(22일)

○ 작업금액 : ₩7,802,931원

작업지시내용	작업결과	증감사유	비고
○ 중랑캠핑숲 공원등 조도개선
공원등 이설 1개소 기초 1개소 설치 볼라드 등 설치 2개소 터파기 약 30m 기타 부대공사(배관‧배선 등)	공원등 이설 1개소 기초 1개소 설치 볼라드 등 설치 2개소 기초 2개소 설치 터파기 71m 기타 부대공사(배관‧배선 등)		중랑캠핑숲 요청
○ 낙산공원 공원등 설치
경로당 산책로 계단 신설장소 공원등 설치 볼라드등 설치 4개소 기초 4개소 설치 터파기 약 100m 기타 부대공사(배관‧배선 등)	경로당 산책로 계단 신설장소 공원등 설치 볼라드등 설치 4개소 기초 4개소 설치 터파기 75m 기타 부대공사(배관‧배선 등)		창신2동사무소 요청(창신제2동-7819,2014.6.30.)
○ 북측순환로 공원등 보수작업
LED 등기구 19개소 낙뢰 보호기 설치(자재 지급)	LED 등기구 19개소 낙뢰 보호기 설치		자체점검
○ 남산공원 용암천 공원등 보수작업
-인입선로 및 주내배선 보수 1개소	-공원등주 철거 1개소 -공원등주 설치 1개소 램프 및 안정기 교체 1개소 주내배선 보수 1개소		자체점검
○ 북측순환로 공원등 보수작업
-공원등 누전회로 탐사 -기타 부대공사(배관‧배선 등)	-공원등 누전회로 탐사(감) -기타 부대공사(배관‧배선 등)(감)	추후 작업지시

▢ 작업물량

○ 첨부 내역서 참조

▢ 향후계획

○ 금회 작업 완료된 물량 및 금액은 준공시 반영 처리

▢ 연간단가 공사비 현황

작업지시	작업내용	차수별공사금액	잔액
1차	낙산공원 한전전원 인입선로 신설등 4건	7,754,072	123,427,608
2차	중랑캠핑숲 주차장 확충공사등 8건	49,958,417	73,469,191
3차	남산공원 잠두계단 공원등 보수등 11건	18,181,503	55,287,688
4차	중랑캠핑숲 공원등 조도개선등 4건	7,802,931	47,484,757
소계		83,696,923	47,484,757

첨부  1. 제4차 작업완료 내역서 1부.

2. 작업사진  1부 (별도 첨부). 끝.