투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행(1회)

우리사업소에서 시행중인 『2014년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(1회)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 4. 1. ~ 2015. 2. 28.(변경없음)

다. 계약금액 : 519,924,000원(변경없음)

라. 도 급 자 : 삼서건설(주)  나남열

마. 설계변경사유

- 맨홀 인상높이 신규공종(h=15~25cm) 발생에 따른 반영

- 평탄성 확보를 위한 추가커팅(5~15cm) 맨홀에 대한 신규공종 적용

- 공종별 수량 조정

바. 설계변경내역

- 공사비(변경없음)                                    (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	519,924,000	519,924,000	-
도 급 비	519,924,000	519,924,000	-
관 급 비	-	-	-
이 전 비	-	-	-

사. 예산과목

- 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부. 끝.

주무관	하승환		도로보수과장	국중진		성동도로사업소장	08/04 정진오
협조자	계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-3582	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	02-2210-1566	/전송	02-2210-1549	/	hsh1647@seoul.go.kr	/	대시민공개