함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	변경계약의뢰(암사아리수정수센터 1정수장역세송풍기 및 배관교체공사)

1. 재무과 재정합의(정수시설과-2042‘14.8.4)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리 센터에서 시행중인 『1정수장 역세송풍기 및 배관교체공사』에 대하여 아래와 같이 변경 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 암사아리수정수센터 역세송풍기 및 배관 교체공사

나. 공사기간 : 2014. 4. 28 ~ 2014. 8. 25

다. 도 급 액 : 금256,686,165원

라. 도 급 자 : 일성설비(주) 대표 김 형 옥

마. 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비

바. 하자담보기간 : 준공검사일로부터 2년

사. 설계변경 내역(도급비)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증 ∙ 감
도 급 비	256,686,165원	254,326,678원	감)2,359,487원

아. 설계변경 사유 : 보험료 정산 및 시공물량 증·감

붙 임 :  1) 설계변경 내역서 1부.

2) 심의결과서 1부.

3) 방침서 및 재정합의서 1부.

4) 합의서 1부.   끝.

	암사아리수정수센터소장
★주무관	이우봉		정수시설과장	08/04 남효돈
협조자
시행	정수시설과-2046	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개