투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	변경계약 의뢰(설계변경 1회)

우리사업소에서 시행 중인 『2014년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)』에 대하여 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 관내포장도로 불량맨홀정비공사(연간단가)

나. 도 급 자 : 삼서건설(주) 나남열

다. 변경내용

1) 준공기한 : 당초 2015. 2. 28.(변동없음)

2) 도 급 비 : 당초 519,924,000원(변동없음)

라. 변경사유 : 현장여건에 따른 시공물량 증·감 및 신규공종 발생에 따른 변경

마. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비.

첨  부 : 설계변경(1회) 방침서 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	하승환		도로보수과장	08/04 국중진
협조자
시행	도로보수과-3587	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	02-2210-1566	/전송	02-2210-1549	/	hsh1647@seoul.go.kr	/	대시민공개