문서번호	조경지원과-8562
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경지원과장	동부공원녹지사업소장
채해바래		김제중	08/04 이춘희
협조
	주무관		박종천

양묘장 및 길동생태공원 급수관 설치공사

준공기한 연기 검토 보고

2014. 8.

동부공원녹지사업소

조경지원과

「양묘장 및 길동생태공원 급수관 설치공사 」

준공기한연기 검토보고

양묘장 및 길동생태공원 급수관 설치공사 중 덕은양묘장 비닐하우스내 국화 및 3기 꽃묘로 인해 급수관 설치작업이 어려운 바, 국화 등 꽃묘 분양후 작업이 가능하므로 준공기한을 연기하여 시행하고자 함

1		공사개요	7

위    치 : 덕은 및 난지양묘장, 길동생태공원

공사기간 : 2014. 6. 19 ~ 8. 17

도 급 액 : 금58,675,790원(금오천팔백육십칠만오천칠백구십원)

도 급 자 : 신화총업(주) 대표 정종복

2		준공기한 연기	7

연기사유

▷ 덕은양묘장 비닐하우스내 국화 및 3기 꽃묘로 인해 급수관 설치작업이 어려운 바, 국화 등 꽃묘 분양후 작업이 가능하므로 준공기한 연기

준공기한 변경

▷ 당 초  2014. 6. 19 ~ 2014. 8. 17

▷ 변 경  2014. 6. 19 ~ 2014. 10. 15(60일 연장)

지체상금 부과여부 검토

▷ 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

▷ 지체상금 부과여부 : 미부과

3		향후계획	7

계약부서(공원운영과)에 변경계약을 요청하고 공기내 공사가 마무리 될 수 있도록 만전을 기하고자 함

붙 임 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.