문서번호	시설보수과-5698
결재일자	2014.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
최완		08/04 代김발현
협조

화랑고가 성능개선공사 실정보고

(점검통로설치 관련)

2014. 8.

북부도로사업소

[시설보수과]

화랑고가 성능개선공사 실정보고 (점검통로 설치 관련)

우리사업소에서 시행중인 『화랑고가 성능개선공사』관련 점검통로설치에 대한 실정 보고임.

□ 관련근거 : 시설보수과-4576호(2014.06.26.) 화랑고가 성능개선공사                 실정보고와 관련임

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 화랑고가 성능개선공사

○ 공사기간 : 2013년 5월 8일 ~ 2014년 8월 31일

○ 도 급 액 : 837,529,000원

○ 공사개요 : 교량받침설치 - 68개소, 연단보강 – 14개소(P1~P3, P6~P9)

○ 시 공 자 : 현근이엔씨(주)

○ 감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단 공사감독2처

□ 보고내용

○ 점검통로 재설치 대상 : 교각 P2,P3,P6,P7,P8, L=157m,￦81,640천원

- P2(L=18.1m), P3(L=33.8m), P6(L=37.8m), P7(L=37.8m), P8(L=29m)

○ 기 실정보고시 화랑고가 교각 연단보강으로 교량점검통로 철거하고

재설치(P2,P3,P6,P7,P8)하는 교량점검통로에 대하여 P2,P3,P6구간         설치는 본공사에서 시행하고, 예산부족으로 P7,P8구간 점검통로설치는        일상유지보수공사에서 시행토록 되어 있으나,

○ 일부 예산확보로 P2구간 L=18.1m ￦9,412천원은 일상유지보수공사에서 설치코자 함

□ 조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 P2구간은 우리사업소와 계약된 일상유지보수공사에         설치토록하여 화랑고가 성능개선공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 화랑고가 성능개선공사 실정보고서 1부.   끝.