문서번호	도시철도토목부-8552
결재일자	2014.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목2과장	도시철도토목부장
이경훈		윤방식	08/05 이은상
협 조

『서울지하철916공구 건설공사』

건축협의(삼성동 51-2,5)에 따른 검토 보고

2014. 8.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『서울지하철916공구 건설공사』

건축협의(삼성동 51-2,5)에 따른 검토 보고

지하철 916공구 928정거장 인근 삼성동 51-2,5호에 건물신축을 위한 건축허가 협의 요청이 있어 지하철공사의 영향 및 안정성 등에 대한 검토 보고임

Ⅰ		건 축 개 요

대지위치 : 강남구 삼성동 51-2,5 (구 수원왕갈비)

증축규모 : 대지 - 969㎡,

연면적 - 9,329.16㎡ (지하2층. 지상17층)

건물용도 : 업무시설, 근린생활시설

Ⅱ		지하철공사 추진현황

신축건물 위치 : 928정거장 1,2번출입구 인근

지하철시공현황 : 928정거장 - 구조물 및 되메우기 완료

#1 출입구 – 구조물 및 되메우기 완료

#2 출입구 – 토공작업 중 (구조물 완료예정일 – 2014.11월)

#2 신축예정지 (구)수원왕갈비 #1	17.4 9.2 2.2 신 축 공사장 928정거장 구조물 완료

Ⅲ		신축공사에 따른 지하철영향 및 안정성 검토

신축건물 굴착개요

- 굴착깊이 : 11.9~17.5m (928정거장 #2번출입구 – 19.2m 중 9m 굴착)

- 굴착일정 : C.I.P – 2014.08월

굴착공사 - #2번 출입구 구조물 및 되메우기 완료 후 시행

- 흙막이 벽체 공법 : C.I.P공법, H-Pile + 토류판 공법

- 흙막이벽체 지지공법 : STRUT 공법

구 분	검 토 내 용	조치내용
원설계자 및 시공사	○ 신축건물 착공시기를 928정거장 #2번 출입구 구조물 및 되메우기 완료 이후 시행 ○ 진동계측관리계획을 수립하여 지하철구조물에 영향이 없도록 조치	○ 반영 ○ 반영
기술지원감리	○ 신축건물 굴착은 출입구 구조물 완료 이후 시행	○ 반영

Ⅳ		처 리 의 견

원설계자와 기술지원감리의 검토내용에 대해 삼성동 51-2호 건축주가 신축 공사일정 등을 보완함으로써 건물 신축에 따른 지하철 안정성 확보에 문제가 없을 것으로 판단되므로 아래의 조건으로 협의회신하고자 합니다.

- 신축공사로 인하여 지하철공사에 유해현상이 없도록 시방기준에 의한 굴착공사 시행과 계측 및 시공관리 철저

- 지하철공사 감리자 및 시공업체와 긴밀히 협의하여 건축공사 시행

- 신축공사 측과 지하철 공사 측에서의 공공도로(보도) 복구범위와 방법에 대해서는 관리청(강남구)에서의 조정 필요

- 협 의 조 건 -

첨부 : 감리단 검토결과 1부.  끝.