문서번호	정수시설과-1545
결재일자	2014.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
송종봉		안길찬	08/05 박기석
협조

설계변경(2차) 심의위원회 개최결과보고

(기계설비보수공사-연간단가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08

강북아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 심의위원회 개최 결과보고

우리 센터에서 시행하는 2014년도 기계설비 보수공사(연간단가)에 대하여 계약물량과 상이하고, 신규 공정 발생에 따른 설계변경요인이 발생하여 이를 설계변경에 반영하고자 하며, 사용하지 않은 경비에 대해 정산코자 합니다.

1. 공 사 현 황

가. 공 사 명 : 기계설비 보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 3. 28 ~ 2014. 12. 20

다. 도 급 액 : 70,124,000원

라. 공사개요

1) 밸브수리                          2) 후염소혼화촉진장치 설치

3) 여과지동 계측기실 드레인배관 개량   4) 활성탄 투입 지지대 설치

5) 여과지 퇴수밸브 교체 등

마. 도 급 자 : (주)유진엔지니어링  대표  최낙진

2. 보 고 내 용

가. 설계변경사유

1) 당초 기계설비 수리를 위해 연간단가계약을 추진하였으나 당초 계약물량과 상이하여 정산코자 하며, 여과지동 계측기실 드레인배관 개량 및 활성탄 투입 지지대 설치, 여과지 퇴수밸브 교체 등 신규물량에 대하여 설계변경에 반영코자 함.

2) 작업지시에 의한 신규공종 및 물량증감 내용

- 신규공종 : 여과지동 계측기실 드레인배관 개량 및 활성탄 투입지지대 설치, 여과지 퇴수밸브 교체, 정수지 밸브대 도색 등

- 시공물량 증감 : 후염소 혼화촉진장치 설치 야간할증물량 증감

3) 주요공종 수량변경내용

공 종	단 위	수 량		비 고(증․감)
		당 초	변 경
여과지 퇴수밸브 교체 (∅250)	개	0	3	증) 3
도장공사	㎡	208	7	감) 201
폐철 고재처리	kg	51.2	747.2	증) 696
여과지동 계측기실 드레인배관 확장	개소	0	2	증) 2
송수동 역지밸브 수리	개	0	2	증) 2
활성탄 투입 지지대 설치	개소	0	1	증) 1
후염소 혼화촉진장치 설치(야간할증) 적용	ton	0.931	1.077	증) 0.146

4) 공사비 변경내용

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증․ 감	비 고
합 계		70,124,000	73,579,000	(+)3,455,000	(+)4.93%
도급비	계	70,124,000	73,579,000	(+)3,455,000
	공급가액	63,749,091	66,890,000	(+)3,140,909
	부가세	6,374,909	6,689,000	(+)314,091
관급자재비 등		0	0	0

나. 정산내용

구 분		산출금액	정산금액	증․ 감	비 고
합 계		2,286,198	946,500	-1,339,698
경비	건강보험료	400,624	0	-400,624
	연금보험료	586,796	0	-586,796
	노인장기요양보험료	26,241	0	-26,241
	산업안전보건관리비	1,001,785	946,500	-55,285	내역서
	환경보전비	270,752	0	-270,752

3. 조 치 의 견

위와 같이 신규공종 및 시공물량 증․감으로 인한 설계변경 사항을 자체 심의한 결과 원안대로 가결됨에 따라 계약상대자와 합의한 후 설계변경에 대한 계약을 추진하고, 사용하지 않은 경비에 대하여 정산코자 합니다.

따로붙임  1. 설계변경 심의결과서 1부.

2. 설계변경 내역서 및 제비율검증 1부.

3. 보험료 완납증명서 1부.

4. 산업안전보건관리비 내역서 1부.  끝.