문서번호	시설과-4679
결재일자	2014.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장
황인공	이춘한	08/05 공헌구
협 조

- 서울대공원 독신자숙소 리모델링 소방전기공사(1차) -

준공기한 연기 검토보고

2014년 8월

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타■				무 □
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

- 서울대공원 독신자숙소 리모델링 소방전기공사(1차) -

준공기한 연기 검토보고

『서울대공원 독신자숙소 리모델링 소방전기공사(1차)』와 관련한  준공기한 연기 요청에 대하여 다음과 같이 보고합니다.

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울대공원 독신자숙소 리모델링 소방전기공사(1차)

□ 공사기간 : 2014. 7.15 ~2014. 8.12

□ 계약금액 : 금14,530,000원

□ 계 약 자 : ㈜비마전기 (대표:박상래)

Ⅱ		준공기한 연기요청

□ 준공기한 연기 요청 사유

- 선행 공정인 건축공사「서울대공원 독신자숙소 1차 리모델링 공사」공사기간이 2014.9.13.으로 공사 공정상 절대공기가 부족.

Ⅲ		조치계획

□ 준공기한 연기

-  시공사 절대공기 부족이 타당함으로 인정되어 준공기한을 아래와 같이 연장하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

구 분	변 경 사 항		비 고
	당 초	변 경 후
공사기간	2014. 07.15. ~ 2014. 8.12.	2014. 07.15 ~ 2014. 9.15.

- 지체상금 부과여부 : 미부과.  끝.