문서번호	설비부-8652
결재일자	2014.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
이재홍		김창균	08/05 代권오식
협조

『관악산 저류조 전기공사』

설계변경(1회) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

도시기반시설본부 설비부

『관악산 저류조 전기공사』

설계변경(1회) 검토 보고

「관악산 저류조 전기공사」 관련, 수방기간 임시운영 및 시공물량 정산등에 따른 설계변경 사항에 대하여 검토 보고드림.

공사개요

○ 공 사 명 : 관악산 저류조 전기공사

○ 규    모 : 전력수전 및 간선설비, 전등․전열설비, 기타(배관, 배선 등)

저류조 65,000㎥(서울대정문 40,000㎥, 버들골 20,000㎥, 공대폭포 5,000㎥)

○ 공사기간 : 2014. 04. 21 ~ 2015. 05. 30

○ 감 리 사 : ㈜신명건설기술공사

○ 시 공 사 : 에이포유전기(주)

○ 계약금액 : 248백만원

관련근거

○ 설비부-4725(2014.05.01)호 : 업무지시(도림천 상류 임시저류조설비 재활용)

○ 설비부-5471(2014.05.22)호 : 실정보고 승인(수방기간 임시운영)

○ 도림천(감) 2014-212(2014.07.28.)호 : 실정보고(설계변경)

주요 변경내용

구 분	주요 변경내용	비고
버들골 공대폭포	공사완료에 따른 시공물량 정산
공통	수방기간 임시운영을 위한 임시 가설 설치․철거

설계변경 금액

○ 변경금액(단위 : 원)

구 분	당초	변경	증 감
공 사 비	248,005,970	258,819,000	증 10,813,030

※ 공사비 증액분(10,813,030원)은 예산집행잔액 사용

○ 공종별 변경금액(단위 : 원)

구 분	공종	당초	변경	증 감
서울대정문	전력간선․동력	40,518,492	40,518,492	0
	전등․전열	32,851,591	32,851,591	0
	임시가설	0	3,024,188	3,024,188
버들골 (노천강당)	전력간선․동력	32,624,142	23,921,266	-8,702,876
	전등․전열	25,813,959	26,100,034	286,075
	임시가설	0	8,572,846	8,572,846
공대폭포	전력간선․동력	15,225,312	11,442,760	-3,782,552
	전등․전열	5,211,771	3,012,713	-2,199,058
	임시가설	0	7,896,811	7,896,811
계		152,245,267	157,340,701	5,095,434
제경비	부가세포함	95,760,703	101,478,299	5,717,596
합 계		248,005,970	258,819,000	증 10,813,030

○ 예산집행현황(단위 : 원)

예산액	원인행위액(집행금액)	집행잔액	비고
1,800,000,000	1,341,888,039	458,111,961

※ 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책사업, 관악산 저류조 설치, 시설비

보고자 의견

□ 감리원의 설계변경 보고가 타당함으로 승인하고 계약부서에 변경계약을 의뢰       하고자 함.

붙임 : 1. 기술검토의견서(감리) 1부.

2. 설계변경내역서 및 설계변경도면 각 1부.

3. 제비율검증표 1부.  끝.