의원 요구 자료 제출

시 행	건설총괄부-19278	(		)
접 수		(		)
결재일자	2013.10.7.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관),서 울 특 별 시 장(교통정책과장)

주무관	건설총괄부장	시설국장	도시기반시설본부장		결재
박병선	이비오	이광세	10/07 조성일
협 조
	건축부장			代강성욱
	도시철도공무부장			이은상
	토목부장			김만수
	기획예산과장			이종만

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 677번, 문병호 의원, 국토교통위원회)

국회 국토교통위원회  문병호 의원(민주당, 인천 부평구갑)께서 요구하신 자료를 붙임과 같이 제출합니다.

※ 2013년 국정감사관련 요구자료

붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

문병호 의원(국토교통위원회, 민주당)

<요구번호 : 677번>

1. 발주공사 지연으로 인한 공사비 등 추가 비용 현황(연도별)

- 공사개요, 업체(시행사 등) 현황 표기

2. 발주공사 지연으로 인한 쟁송 현황 및 쟁송사유(공사지연사유 포함)

2-1 쟁송패소(부분패소)로 인한 부담액 현황

- 공사개요, 업체(시행사 등) 현황 표기

2-2 쟁송이 진행 중인 현황 및 쟁송사유(공사지연사유 포함)

- 공사개요, 업체(시행사 등) 현황 표기

- 쟁송업체의 공사지연금 요구액 표기(쟁송패배시 지급금액)

□ 의원님께서 요구하신 ｢1. 발주공사 지연으로 인한 공사비 등 추가비용 현황｣ 및 ｢2-1쟁송패소로 인한 부담액 현황｣과 관련하여 우리 본부(도시기반시설본부)는 해당사항이 없음을 알려드립니다.

□ ｢2-2. 쟁송이 진행 중인 현황 및 사유｣는 아래와 같습니다.

공사명		공사개요		공사기간		시공사	지연사유	공사지연금 요구액 (백만원)
		내용	계약금액 (백만원)	당초	변경
구로역~남부순환로간 도로개설공사		도로개설 폭20m, 연장820m	6,157	09. 2.27 ~11. 2.26	09. 2.27 ~12. 6. 4	㈜삼일기업공사	- 추가공사 실시설계 - 보상 지연	254
양화대교 구조개선공사		아치교량 신설 (L=112m)	46,110	10.2.22 ∼11.12.31	10.2.22 ∼13.2.28	현대산업개발㈜	공사중단 및 예산사정	1,760
에너지제로하우스 건립공사		지하1/지상3 연면적 3,762.32㎡	17,475	09.12.18 ～10.12.17	09.12.18 ～12.07.31	대경건설 외 2개사	공간계획 재설계에 따른 공사기간 연장	833
강북소방서 건립공사		지하1층/지상4 연면적 5,872.69㎡	8,406	10.01.21 ～11.09.20	10.01.21 ～12.05.31	삼일기업공사	흙막이 공법 변경	283
지하철 7호선 연장	701 공구	구간 : 온수동 ~ 종합운동장 규모 : 총연장 2,560m	114,000	04.12.31~11.3.31	04.12.31~12.12.31	대림산업 벽산건설 삼부토건	예산사정	2,585
	702 공구	구간 : 종합운동장~춘의사거리 규모 : 총연장 1,372m	157,000	04.12.31~11.3.31	04.12.31~12.12.31	현대건설 한진중공업 고려개발	예산사정	4,749
	703 공구	구간 : 춘의사거리~부천시청 규모 : 총연장 1,905m	163,000	04.12.31~11.3.31	04.12.31~12.12.31	대우건설 코오롱건설신한	예산사정	3,263
	704 공구	구간 : 부천시청 ~ 부평구청 규모 : 총연장 2,015m	183,124	04.12.31~11.3.31	04.12.31~12.12.31	삼성물산 두산건설 우미토건	예산사정	3,532

끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (건설총괄부) (토 목 부) (건 축 부) (도철공무부)	담당사무관	이종만 김영수 강성욱 한동근
	☎ 3708-2313	담당자	박병선 장기철 정제국 박희석
	작 성 일 : 2013. 10.