국회의원 요구 자료 제출

시 행	임대주택과-12356
결재일자	2013.10.17.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조

주무관		택지개발팀장	임대주택과장	주택건축정책관	주택정책실장	결재
최훈		조영국	한병용	강맹훈	10/17 이건기
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1200, 이장우 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 :      (국회)의원 요구자료 1부.  끝.

이장우 의원(국토교통위원회, 새누리당)

<요구번호 1200번>

○ 고령자 전용 임대주택 사업지구별 추진계획

- 총사업비

- 예산확보현황

- 지구별 세대

- 장소(선정여부, 선정방식 및 기준)

- 행정절차 별 추진현황

의원님께서 요구하신 자료는 아래와 같습니다.

□ 고령자 전용 임대주택 사업지구별 추진계획

○ 소요사업비 및 지구별 세대

- 소요사업비 6,886억원(SH공사 사업비용으로 서울시 비예산)

지구명	지구별 세대수	사업비(억원)	비고(준공일)
계	3,031세대	6,886
세곡지구(4단지)	407세대	946	2011년 (1,448세대)
강일2지구	311세대	628
신정3지구	283세대	593
천왕지구	293세대	641
마천지구	154세대	294
천왕2지구(1단지)	68세대	197	2013년 (261세대)
신내3지구(2단지)	136세대	324
내곡지구(7단지)	57세대	178
천왕2지구(2단지)	60세대	160	2014년 (823세대)
신내3지구(1단지)	74세대	171
마곡지구(1～7,14,15단지)	354세대	1,323
내곡지구(1,3,5단지)	59세대	148
세곡2지구(3,4단지)	276세대	786
내곡지구(6단지)	59세대	70	2015년 (386세대)
세곡2지구(6,8단지)	101세대	96
강일지구(11단지)	88세대	79
천왕지구(7단지)	74세대	59
내곡지구(2단지)	64세대	65
마곡지구(13단지)	113세대	128	2016년 (113세대)

※ 2011~2014년 사업지구의 소요사업비 : 아파트 기준 건축비+택지비 합산 금액임

2015년 이후 사업지구는 건축비만 산정(택지비 미산정으로 제외)

○ 예산확보현황

- 사업시행자인 SH공사에서 지구전체 계획 사업비로써 고령자 전용 임대주택 선정기준에 따라 건설

○ 장소(선정여부, 선정방식 및 기준)

- 특정장소를 대상으로 추진하고 있지 않으며, 우리 시에서 건립중인 각 임대 주택단지의 1~2층을 고령자 전용 임대주택으로 공급하고 있음

※ 행정2부시장 방침 제10,102호(‘11.8.30) 고령자 주택 공급 개선계획

- 고령자 신체특성을 고려하여 임대주택 저층부(1~2층)에 계획하여 추진중임

- 임대주택 1~2층 이외에 전용단지 및 맞춤동 시범사업 추진

∙전용단지 : 단지 전체를 고령자 전용 임대주택으로 공급(세곡지구 4단지 407세대 기공급)

∙맞춤동 : 10개동 이상 대규모 단지내 편의시설 인접한 동 전체를 고령자

임대주택으로 공급(내곡지구 2단지 1개동 64세대, 마곡지구 13단지 3개동 113세대 추진중)

○ 행정절차 별 추진현황

- 추진완료 사업장 : 1,505세대 기공급

- 추진중인 사업장 : 1,526세대 공사중

지구명	고령자 계획	추진현황	비 고
계	3,031세대
세곡지구(4단지)	407세대	2011년 입주완료	추진완료 사업장
강일2지구	311세대	2011년 입주완료
신정3지구	283세대	2011년 입주완료
천왕지구	293세대	2011년 입주완료
마천지구	154세대	2011년 입주완료
내곡지구(7단지)	57세대	2013.09.11 준공(입주중)
천왕2지구(1단지)	68세대	마감공사 중(공정율99%) (2013.11월 준공예정)	추진중인 사업장
신내3지구(2단지)	136세대	마감공사 중(공정율97%) (2013.11월 준공예정)
천왕2지구(2단지)	60세대	마감공사 중(공정율97%) (2014.01월 준공예정)
신내3지구(1단지)	74세대	마감공사 중(공정율80%) (2014.05월 준공예정)
마곡지구(1～7,14,15단지)	354세대	골조공사 및 마감공사 진행중(공정율73%) (2014.05월 준공예정)
내곡지구(1,3,5단지)	59세대	골조 및 마감공사 중 (2014.7/5/4월 준공예정)
세곡2지구(3,4단지)	276세대	마감공사 진행중(공정율79%) (2014.02월 준공예정)
내곡지구(6단지)	59세대	토공사 중(’13.10.1착공) (2014.12월 준공예정)
세곡2지구(6,8단지)	101세대	착공준비 및 토공사 중
강일지구(11단지)	88세대	설계진행 중 (2013년12월 공사발주 예정)
천왕지구(7단지)	74세대	공사계약 완료 (2013년10월말 착공예정)
내곡지구(2단지)	64세대	지하층 공사 중(18%) (2015.03월 준공예정)
마곡지구(13단지)	113세대	설계진행 중 (2013년12월 공사발주 예정)

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (임대주택과)	담당사무관	조 영 국
	☎ 2133-7079	주무관	최 훈
	작 성 일 : 2013. 10.