문서번호	물관리정책과-13866
결재일자	2013.10.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	토양지하수팀장	물관리정책과장	물관리정책관
양인혜	오세영	배광환	10/18 정만근

2013년 토양오염실태조사

시료채취용역 설계변경

2013.10.

도시안전실

(물관리정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	보건환경연구원, 자치구	)	무 □

2013년 토양오염실태조사

시료채취용역 설계변경

2013년 토양오염실태조사 시료채취 용역 중 여건변화 등에 따른 과업내용 변경으로 설계변경 시행하고자 함

1		용역 개요

○ 용 역 명 : 2013년 토양오염실태조사 시료채취 용역

○ 계 약 자 : ㈜드림바이오스외 1개사

○ 계약기간 : ’13.5.27 ~ 10.31

○ 계약금액 : 101,850천원(당초)

○ 주요과업 : 시료채취, GPS측정, 시료채취공 원상복구

2		변경 내용

○ 변경 근거

- 시료채취용역 과업변경 검토(물관리정책과-7087, ’13. 5.29)

- 대상지역 조정(감) 보고   (물관리정책과-13653, ’13.10.15)

○ 주요 변경내용

- 시료 분석수 조정 : 85개 감(660개→575개)

- 시료 굴착공 조정 :  3공 감(330개소, 554공→328개소, 551공)

- 시료 채취공 원상복구(포장 및 도장) 물량 감소

○ 계약금액 변경 : 감 727,000원(101,850,000원→101,123,000원)

구 분	당 초	변 경	증·감
계	101,850,000원	101,123,000원	△727,000원
실태조사 시료채취	46,110,528원	45,645,942원	△464,586원
GPS측정조사 및 자료처리	20,317,396원	20,207,374원	△110,022원
시료채취공 원상복구	13,773,400원	13,662,751원	△110,649원
제경비 등 (부가세 포함)	21,648,676원	21,606,933원	△ 41,743원

3		행정 사항

○ 설계변경 내용 반영하여 계약변경하고, 준공처리

○ 시료분석은 ’13.12.31까지 보건환경연구원에서 시행

붙임 : 용역비 산출내역서(전·후) 각1부.  끝.