문서번호	마곡조성담당관-7568
결재일자	2013.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목계획팀장	마곡조성담당관		마곡사업추진단장
이기원	代이기원	代임대운		10/02 서노원
협 조

단지조성 공정점검(13차) 결과 보고

2013. 10.

마곡사업추진단

(마곡조성담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □

단지조성 공정점검(13차) 결과보고

Ⅰ		점검개요

일   시 : ′13. 9. 30(월) 16:30

장   소 :  마곡 1공구 현장사무실

참 석 자 : 마곡조성담당관 (담당)

SH공사 (토목조경팀 담당)

현장소장, 현장감리단장 (1▪2공구, 빗물펌프장)

안   건 : 단지조성 공정 진행상황 점검 및 추진대책

〔공정현황〕

○ 단지조성공사 : 공정률 45.6% ('13. 9.30 현재)

- 간선하수박스   : 1,115m중  1,075m 완료 (96.4%)

- 공동구(1공구)   : 1,158m중    955m 완료 (82.4%)

(2공구)  : 1,506m중  1,352m 완료 (89.8%)

○ 신설 빗물펌프장 : 공정률 19.5%

- 펌프장 구조물 : 2펌프장 구조물 1단 벽체 철근 및 거푸집 조립

○ 유비쿼터스도시건설공사(U-CITY) : 공정률 7.2%

- 1지구 정보통신인프라 관로공사 진행

Ⅱ		점검결과 및 조치

사업관 인근 공항로에서 굴착중인 KT 공사장 추락/붕괴사고 등 안전사고 발생이 없도록 접근 통제 등 현장 안전관리 철저(KT 협조)

- 현재 남측 공항로에는 5호선 마곡역 출입구 횡단통로 하부에 통과하는 통신박스 설치를 위한 굴착공사 진행중(깊이 약 18M)으로 추락/붕괴사고 발생이   없도록 안전휀스 보강 설치 및 보행인(취객)의 접근통제 등 현장 안전관리 철저

(발산대로 보도 주변에서 진행중인 공사로서 KT에 철저한 안전관리 요구 필요)

공사장 자체 안전점검 실시 및 보완정비 조치 철저

- 공사장 사고 발생예방을 위한 자체 안전점검 실시(기 통보 : 마곡조성담당관-7236호, '13.9.17)관련 정기적인 자체 안전점검이 내실 있게 진행될 수 있도록 관리 철저

강우시 내구성 증대 및 포장파손 저감 등을 위한 도로포장 수준향상 개선방안 시행(市 도로관리과) 관련, 공항로 버스전용차로 등 도로포장 시공시 품질확보를 위한 관리감독 철저

- 공항로 버스전용차로 정류장 구간 포장재료 변경 시험적용 관련 도로관리과 협조 철저 (개질아스팔트, 프리캐스트 판넬, 초속경 콘크리트 시험적용)

- 아스팔트 생산, 운반, 포설, 다짐 등 시공 단계별 온도 및 다짐관리 철저 등