문서번호	설비부-8752
결재일자	2014.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	환경설비과장
김두환	08/07 이달영

설계변경 소위원회 심의 자문요청

- 천호대로(광나루역) 확장 전기공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 08

도시기반시설본부

(설비부)

설계변경 소위원회 자문요청서

문서번호		요청부서	설비부	요청일	2014. 08. .
공 사 명	천호대로(광나루역) 확장 전기공사
공사개요	공사규모	L=900m(도로폭6차로→10차로) 지하차도(L=200m)포함
	공사기간	2011. 06. 16 ~ 2015. 12. 31.
	감 리 사	(주)수성엔지니어링
	설 계 사	(주)대한콘설턴트
	시 공 사	(주)거성전설
심의요청 사 유	∘ 3,000만원 이상 설계변경(증액)
<설계변경 사항(요약)> ○ 지하차도 보행자통로박스내 조도향상 조정요구(22Lx→150Lx이상)로 인한 물량 변경 - 성동도로교통사업소 요구사항 반영(보행환경 개선 및 우범취약지역 해소)
<원설계자 의견(요약)> ○ 해당사항 없음
주 요 변 경 내 용
○ 주요 변경 내용 : 별첨서류 참조
별첨서류	1. 방침서 1부(별첨).

설계변경명 : 천호대로(광나루역) 확장 전기공사 보행자통로 박스 평균조도 변경

■ 현 황

계 약 명	천호대로(광나루역) 확장 전기공사		시 공 자	(주)거성전설
공 사 규 모	L=900m(도로폭6차로→10차로) 지하차도(L=200m)포함	계 약 금 액	총차 1,175,091,519원			계약일
						2011.06.16
공사기간	2011. 06. 16 ～ 2015. 12. 31	감리자	(주)수성엔지니어링		설계자	(주)대한콘설턴트
계약형태	기타( ), 턴키( ), 대안( ) 장기계속공사(●), 계속비공사( )				※ 작성자 : 김두환 ☎ 3708-8621

■ 설계변경 개요                                         (단위 : 천원)

구 분	설 계 변 경 전		설 계 변 경 후	증/감
변 경 개 요	○지하차도 보행자통로 박스내 평균조도(22Lx) -좌측 통로:39등(50W/39등) -우측 통로:40등(50W/40등) -등기구 설치간격 : 12m		○지하차도 보행자통로 박스내 평균조도 향상(150Lx이상)로 인한 물량 변경 -좌측 통로:201등(37W/132등, 19W/69등) -우측 통로:192등(37W/127등, 19W/65등) -등기구 설치간격 : 2.5m	증)314등
공사비	총 1,175,091천원		총 1,226,893천원	증)51,802천원
적용요율	낙찰율 86,8632%		낙찰율 86.8632%
설계변경 요구자	□발주처 □계약상대자
협의율 적용근거	실정보고(통로박스 조명설비 조도변경) 승인 요청(천호수 제2014-522호)
설계변경 근거	방침	-보행자통로 조도개선 실정보고 사항 검토 보고(설비부-8750호)
	관련규정	-터널, 지하보차도 보행환경개선사업 대상 및 추진방법
설계변경배경	○ 지하차도 보행자통로박스내 조도향상 조정요구(22Lx→150Lx이상)로 인한 물량 변경 (인수 부서인 성동도로사업소 기전과 요구사항 반영)

■ 설계변경 세부내용

구 분	내 용	선택 항목
설계변경 유형	① 설계도서 내용 불투명, 누락, 오류. 상호모순 ② 지질, 용수 등 현장조건 상이 ③ 신기술, 신공법 적용 ④ 민원수용, 보수, 보강 ⑤ 피해 건물보상 ⑥ 정책, 계획 등 변경 ⑦ 구조형식변경 ⑧ 제도, 기준변경 ⑨ 운반거리변경 ⑩ 유관기관요청 ⑪ 물가변동에 따른 계약금액조정	⑩
계약금액 조정	① 증액 : 51,802천원 ② 감액 : 천원 ③ 공사비 변경없음( )	①
설계변경 효과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편의증진, ⑦ 민원해소 ⑧ 설계구조보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진	② ③ ⑥ ⑨

■ 설계변경 경위

○ 설계변경 승인절차

- 설비부 설계변경소위원회(계약금액 조정심의) ➞ 설계변경 ➞ 변경계약 ➞ 공사시행

○ 계약금액 조정경위

- 공사계약일반조건 제19조의5, 제20조 및 국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙

제5조에 의거 계약금액 조정