다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	문엔지니어링(주) 대표이사
(경유)
제목	잠실권역 교통정보시스템 구축 사업 책임감리용역 착수일자 연기 통보(2차)

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 사와 우리시간에 계약 체결한 “잠실권역 교통정보시스템 구축 사업 책임감리용역”과 관련하여 아래와 같이 착수일자 연기를 통보하오니, 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 착수일자 변경 내역

○ 당 초 : 2014.07.25.

○ 변 경 : 2014.08.19.

※ 위 착수일자는 본 사업의 입찰 성립 유무에 따라 변경될 수 있으며, 착수일자 변경 필요시 별도 통보 예정임

나. 착수일자 변경사유 : 발주기관(서울시)의 사정으로 책임감리용역 대상 본 사업의 일정이 지연됨에 따라 본 사업과의 일정 조율을 위해 착수일자 조정이 필요함.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김진구		교통정보팀장	정진순		교통정보센터장	08/07 이경순
협조자
시행	교통정보센터-11586	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 종로1길 28 종로소방서 5층	/	http://topis.seoul.go.kr
전화	02-2133-4954	/전송	02-768-8902	/	realgoo@seoul.go.kr	/	대시민공개