부 장		08/07 한동근		과 장	이승우	심사자	김정수	설계자	정영호		설 계	심 사		결 재
											2014년 8월 일	2014년 8월 일
변 경 설 계 서(6차 1회)
	용 역 명 : 서울시 우이-신설 도시철도 민간투자사업 전면책임감리용역 1공구(6차1회)
	구 분					당 초				변 경			증, 감
	총 용 역 비					548,000,000				548,000,000			-
	도급비		공 급 가 액			498,181,818				472,581,818			감) 25,600,000
			물 가 변 동			-				25,600,000			증) 25,600,000
			소 계			498,181,818				498,181,818			-
			부 가 가 치 세			49,818,182				49,818,182			-
			계			548,000,000				548,000,000			-
< 용역개요 > ○ 총연장 : 1,908.3m [본선 1,376m, 정거장 3개소, 차량기지 1개소] ○ 감리기간 : 2014.04.09 ~ 2014.11.14. (변경없음)