문서번호	건축부-9725
결재일자	2014.8.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
이형재		조영수	08/07 김우성
협조

「구로 50+ 캠퍼스 건립공사」

기본설계 VE 워크샵 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8.

도시기반시설본부

(건축부)

「구로 50+ 캠퍼스 건립공사」

기본설계 VE 워크샵 결과보고

『구로 50+ 캠퍼스 건립공사』추진과 관련 설계의 경제성 검토를 위한 기본설계 VE 워크샵을 아래와 같이 개최하고 결과를 보고함

□ 기본설계 VE 워크샵 개최

○ 일     시 : 2014. 08. 05(화)  14:00~17:00

○ 장     소 : 도시기반시설본부 3층 대회의실

○ 안     건 : 구로 50+ 켐퍼스 건립공사 용역 기본설계 VE 워크샵

- 성능모델 작성 / 기능분석 / 아이디어 도출

○ 참 석 자

- 외부 TF 위원 : 서울기술사학원 원장 조민수 등 9명

- 도시기반본부   : 건축부장, 복지시설과장 등 6명

- 설   계   자  : 디엔비건축 박용채 이사 등 7명

□ 진행내용

○ 사전검토 내용 토의

○ 성능모델 작성

○ FAST DIAGRAM 작성

○ 추가 아이디어 도출

□ 워크샵 실시 결과

구분	건축 계획	건축 시공	건축 구조	토목	기계 (소방포함)	전기	계
아이디어	4건	5건	6건	4건	7건	6건	32건
설계보완	5건	3건	9건	5건	3건	2건	27건

※ 아이디어 및 설계보완 내용 첨부문서 참조

□ 처리의견

○ 기본설계 VE 워크샵에서 제출된 아이디어 구체화 및 설계사 검토결과를 기본설계 이행회의시 반영여부를 검토하고자 함

□ 향후 계획

○ 2014. 08.06~08.11 아이디어 구체화 및 기술검토

○ 2014. 08.12          기본설계 이행회의

○ 2014. 08.13~08.21 아이디어 추가협의

○ 2014. 08.22          기본설계 VE보고서 작성

따로 붙임 : 1. 아이디어 및 설계보완 내용 1부.

2. 기본설계 VE 외부전문가 참석자명단1부.

3. 기본설계 VE 워크샵 진행사진 1부.  끝.