투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	준공기한 연기 시행(양묘장 및 길동생태공원 급수관 설치공사)

1. 조경지원과-8562(2014.8.4)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 『 양묘장 및 길동생태공원 급수관 설치공사 』에 대하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 양묘장 및 길동생태공원 급수관 설치공사

나. 도 급 액 : 금58,675,790원(금오천팔백육십칠만오천칠백구십원)

다. 공사기간 : 2014.6.19 ~ 2014.8.17

라. 도 급 사 : 신화총업(주) 대표 정종복

마. 준공기한 연기

1) 연기사유 : 덕은양묘장 비닐하우스내 국화 및 3기 꽃묘로 인해 급수

관 설치작업이 어려운 바, 국화 등 꽃묘 분양후 작업이

가능하므로 준공기한 연기

2) 준공기한 변경

구 분	변경 전	변경 후
내 용	2014.6.19. ~ 8.17	2014. 6. 19 ~ 10.15

바. 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및

도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 양묘장 기반시설 보수

-	동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및

도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원, 길동생태공원 시설물 정비

붙임 : 보고서 1부. 끝.

주무관	채해바래		조경지원과장	08/08 김제중
협조자	주무관	박종천		주무관	김인선		주무관	代지정희
시행	조경지원과-8784	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33(신대방동395)	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-2181-1174	/전송	02-2181-1179	/	bala@seoul.go.kr	/	대시민공개