투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	(주)미타이엔지 대표 박장운 귀하(서울특별시 송파구 가락로 86, 2층)
(경유)
제목	서울역고가 보수공사 행정절차(공사타절등) 진행 재통보

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원하며, ㈜미타이엔지 제2014-0716-07(‘14.07.16)호와 관련입니다.

2. 위 호에 의거 제출하신 「2014년 서울역고가 보수공사」 관련 행정조치 사전 통지에 따른 회신 내용을 검토한 바, 본 사안의 발생 원인인 채권(공사대금) 압류 해결대책,  공정 및 공사 품질 확보에 대한 실질적이고 구체적인 대책이 없는 개괄적인 내용으로 추가 공사 진행이 현실적으로 어렵다고 판단되어 당초 통보 드린 바와 같이 공사타절등 관련 행정절차를 진행함을 재차 알려드립니다.

3. 아울러, 귀사에서는 현재까지 시행한 공중비계의 결속, 합판 체결 부적정등 미비사항에 대하여는 감독기관인 시설관리공단에 보완토록 통보하였으니 보완작업을 조속히 마무리 하여주시기 바라며, 공정이 마무리되는 즉시 기성부분에 대한 검사 및 비용정산을 진행할 계획임을 알려 드리오니 추후 우리 사업소 및 감독기관의 추가 진행 절차에 적극 협조하여 주실 것을 당부드립니다.

4. 이와관련 이의사항이 있으면, 해명서류를 지참하여 2014. 8. 18(월)까지 우리사업소로 대표이사가 직접 방문 소명하여 주시기 바라며, 기한내 방문이 없을시 의견없음으로 간주 처리할 것 임을 알려드립니다.

5. 금번 결정은 안전등급 D등급으로 중점관리대상 시설물인 서울역고가의 안전관리와 시공품질 확보를 위한 불가피한 사항임을 알려드리오니 널리 양지하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	이동섭		주무관	김지환		시설보수과장	08/08 신동헌
협조자
시행	시설보수과-6126	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 상암동 1732	/
전화	02-300-8375	/전송	02-300-8384	/	lds0420@seoul.go.kr	/	대시민공개