문서번호	조경과-5356
결재일자	2013.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
조진성	윤희숙	이성주	양현모		10/04 안영노
협 조
	동물원장			노정래
	총무과장			이경로
	시설과장			배병렬
	동물기획과장			김태원
	동물복지과장			이달주
	동물연구실장			어경연

「백두산호랑이숲 조성공사」 현안업무 검토회의 결과보고

2013. 9

서 울 대 공 원

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

「백두산호랑이숲 조성공사」 현안업무 검토회의 결과보고

「백두산호랑이숲 조성공사」 추진과 관련 공사진행현황 및 현안사항에 대하여 검토하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		회의개요

일    시 : 2013. 9. 16(월) 10:00 ~11:00

장    소 : 회의실

참 석 자 : 22명

◦ 관리부장, 총무과장, 운영과장, 시설과장, 조경과장, 동물기획과장, 동물복지과장, 동물병원장, 동물연구실장

◦ 김남대 강형욱 강재현(총무과), 한상길 김태극  정치상(시설과), 홍성실 이옥하 윤희숙 조진성(조경과), 강경숙(동물기획과), 한효동(동물복지과), 현장대리인 곽영길

회의안건

◦ 공사 추진사항 보고 및 현안사항 검토

Ⅱ		회의내용

공사 추진사항 및 향후계획 보고

현안사항 보고 및 논의 (회의자료 별첨)

◦ 주요현안 사항

- 철제우리 → 야외방사장 기존 담장 높임

- 방사장 경계벽조성 재검토(동물복지과 요구사항)

- 기존 인공암벽체 보수, 폭포 조성여부 검토

- 수원 추가확보 방안, 방사장 뒤편 관리도로 포장

주요 논의내용

◦ 철제우리 철거후 야외방사장 조성지 기존담장 높임

- GRC가 기존소재와 조화되나 자연경관을 배경으로            안전휀스도 고려했으면 함.

◦ 방사장 내부 경계벽은

- 산석붙임보다는 스타코마감이(상부 GRC 제외) 좋겠음.

- 안전휀스를 이중으로 설치하고 휀스는 덩굴식물 등으로 차폐,

휀스앞을 마운딩하여 식재지 조성하는 새로운 안 제시됨.

◦ 기존벽체 보수는 당초 사업비 부족으로 향후 유지관리예산으로 시행하려 하였으나 훼손이 심한곳이 있으므로 꼭 필요한 부분 우선 보수

◦ 폭포는 GRC소재로 조성 반영

◦ 수원 추가확보와 방사장 뒷면 관리도로 포장은 공사비 범위내에 가능한 시행하고 어려울 경우 별도 시행방안 검토.

◦ 부장님 당부사항 : 사안별로 우선순위를 두어 시행하고 안전을 고려하여 시급히 시행해야 할 것과 내년에 시행해도 될 것들을 구분하여 단계별로 추진하기 바람.

Ⅲ		회의결과

검토방향

◦ 금년도 활용가능 예산이 한정되어 있으므로 안전에 문제가 있는 사항은 우선반영

◦ 추후 조치가 가능한 사항은 '14년도 해당사업비 활용

검토의견(종합) - 회의록 별첨

① 야외방사장 뒷담장은 호랑이 탈출방지를 위한 안전조치사항으로 경관과 기존 소재와의 조화를 고려 인공암 시공이 타당

② 방사장 경계벽은 소요예산과 백화현상 발생을 고려 상부 인공암은 제외하고 스타코로 마감처리 (공사비 160백만원 → 77백만원)

※ 휀스 + 수목차폐 + 전책 설치방안 추가검토 (동물연구실장)

③ 기존벽체 보수는 인공암으로 시행, 전체공사비를 감안 정비물량 축소

④ 공사발주시 예산부족으로 제외됐던 벽천은 인공암으로 시공

- 단, 소요예산을 감안 일반인공암으로 시공 (190백만원 → 140백만원)

⑤ 지하수 추가확보는 장기적으로 물 재이용차원에서 (시설과)검토

⑥ 방사장 관리도로 포장은 호랑이숲 통신공사비를 감액하여 활용

- CCTV설치 사업과 연계하여 약10백만원 확보 검토(총무과 협조)

개략공사비 산출

구 분	추 진 안	사업비 (백만원)	비 고
방사장 뒷담장	인공암	191
방사장 내부경계벽	스타코마감(상부 인공암 제외)	77	휀스+수목식재방안 추가검토
기존벽체 보수	관람동선 근접지로 정비물량 축소	70
벽천 조성	일반형인공암	140
수원 추가확보	장기 검토(시설과)	-
방사장뒷편 관리도로포장	아스콘포장	25	통신공사비 감액 검토(총무과)
계		503

Ⅳ		향후계획

결정사항에 대하여 공종별로 세부사항 검토하여 공사반영 추진

◦ 방사장 경계벽(휀스 + 수목식재) 방안에 대하여는 추가 검토하여 결정

※ 현황사진

추진현황 보고

현안사항 논의

붙임 : 회의자료 및 회의록 각 1부.  끝.