문서번호	조경과-5455
결재일자	2013.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	조경과장	관리부장		서울대공원장
조진성	윤희숙	이성주	양현모		10/10 안영노
협 조
	시설과장			代유병설
	주무관			한상길
	주무관			박수현
	주무관			김태극
	주무관			김기배

「백두산호랑이숲 조성공사」 설계변경(제1차) 검토보고

2013. 9.

서울대공원
(관 리 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

- 백두산호랑이숲 조성공사 -

설계변경(제1차) 검토보고

「백두산호랑이숲 조성공사」 추진과 관련 실정보고 사항과 실무회의 결과에 대하여 종합검토하고 아래와 같이 설계변경하고자 보고드림

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 백두산호랑이숲 조성공사

○ 공사기간 : 2012. 12. 27 ~ 2013. 11. 30 (장기계속공사)

○ 공사내용 : 호랑이방사장 확장, 내실보수, 기반시설 정비 등

○ 총공사비 : 1,932,590,610원 (도급액 1,819,308,100원, 관급비 113,282,510원)

※ 도급액 : 총1,819,308,100원 (1차분 759,541,010원, 2차분 1,059,767,090원)

○ 도급업체 : 미래종합조경(주) 주정수, ㈜신영그린시스 심재홍

Ⅱ		변경내용검토

1) 관련근거

○ 실정검토보고

- 조경 : 조경과-4221(2013.8.2),  설비 : 시설과-1446(2013.3.29)

- 토목 : 시설과-1360(2013.3.25), 시설과-4113(2013.8.28)

- 건축 : 시설과-1072(2013.3.6), 시설과-2770(2013.6.13)

○ 실무회의 결과보고(2,3,4,6,11,17차)

2) 주요 검토내용

○ 조경분야

- 모트 철거 물량 중 지반안정화를 위해 일부 존치

- 내실바닥 시멘트독성 피해방지용 호랑이용 목재받침대 제작

- 가설휀스 백두산호랑이 그래픽디자인 설치

○ 토목분야

- 공원관람객 안전 확보를 위한 임시가설도로 개설

- 유지관리를 고려하여 내실 오수처리계획 변경 (기존 방사장 횡단 → 관리자 동선으로 변경)

○ 건축분야

- 푸마방사장 철망교체 신설 (자동문 1개소 포함)

- 내실(소동물관쪽 1개소) 철망 교체 반영 (동물복지과 요구사항)

- 내실 창문 ․ 문 소재 및 교체물량 변경 등

○ 설비분야

- 오수 및 급수배관 위치 및 물량 조정

- 소동물관 ↔ 맹수사간 급수배관 교체 추가

- 동관 및 백관 철거 물량 처리 및 보온재 폐기물 처리 등

○ 기타사항

- 현장여건에 따른 실시공 물량 설계반영 정산

3) 변경물량 및 내역 : 별첨

4) 설계변경 금액 및 확보방안

○ 변경금액

- 총 차

구 분		금 액		증(△)감
		당 초	변 경
총공사비		1,932,590,610	1,979,590,510	46,999,900
도급액	공급가액	1,653,916,454	1,696,643,638	42,727,184
	부가가치세	165,391,646	169,664,362	4,272,716
	계	1,819,308,100	1,866,308,000	46,999,900
관급자재비		113,282,510	113,282,510	-

- 1차분

구 분		금 액		증(△)감
		당 초	변 경
총공사비		775,573,500	822,573,400	46,999,900
도급액	공급가액	690,491,828	733,219,012	42,727,184
	부가가치세	69,049,182	73,321,898	4,272,716
	계	759,541,010	806,540,910	46,999,900
관급자재비		16,032,490	16,032,490	-

- 2차분 : 변동없음

○ 2013년도 본사업 예산 활용하여 설계변경 시행

5) 추진일정

○ 2013. 10월   : 설계변경(1차) 시행

○ 2013. 11.30 : 공사완료

Ⅲ		보고자 의견

○ 위 보고한 바와 같이 설계변경 시행하여 사업추진에 만전을 기하고자 함

붙임 : 변경설계서 및 실정검토 보고서 각 1부.  끝.