문서번호	도로보수과-3654
결재일자	2014.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	성동도로사업소장
하승환		국중진	08/08 정진오
협 조
	주무관			최영서

2014년 노후포장도로정비공사 일일 현황 보고

2014. 8. 7.

성동도로사업소

도로보수과

『노후포장도로 정비공사(1,2구역)』

일일 공사 추진 현황

도로보수과

□ 공사 계획(2014년 08월 08일~08월 11일)

구분	노선명	위 치	규 모	시공사 및 현장소장	담당자	비고
1	동일로	장안교사거리~ 면목교 (양방향)	B=19.5m, L=400m A=78a 표층(일반) t=5cm	두광건설(주) 최성영 *************	도로보수과 하승환 02-2210-1566 ************* 감리원 소정환 *************	8.8 ~ 8.9
2	봉화산로	중화역~이화교 (양방향)	B=13m, L=250m A=32a 표층(일반), t=5cm 중층(재생) t=7.5cm			8.9 ~ 8.10
3	망우로	동부시장사거리~ 체육회사거리 (체육회사거리방향 2,3차로)	B=6.5m, L=480m A=31a 표층(일반) t=5cm			8.10 ~ 8.11

□ 교통통제

구분	노 선 명	위 치	통 제 방 법	통 제 시 간	비 고
1	동일로	장안교사거리~ 면목교(양방향)	양방향 6개 차로중 1~2개 차로씩 부분통제	14.08.08(금)~08.09(토) (22:00 ~ 익일06:00)	절삭후 덧씌우기
2	봉화산로	중화역~이화교 (양방향 전폭)	양방향 4개 차로중 1개 차로씩 부분통제	14.08.10(일)~08.11(월) (22:00 ~ 익일06:00)	절삭후 덧씌우기
3	망우로	동부시장사거리~ 체육회사거리 (체육회사거리방향 2,3차로)	일방향 2개 차로중 1개 차로씩 부분통제	14.08.09(토)~08.10(일) (22:00 ~ 익일06:00)	절삭후 덧씌우기

※ 날씨 및 현장여건에 따라 공사 및 교통통제 내용이 변동될 수 있음

□ 기    타

○ 기상상황

붙 임 : 위치도 1부. 끝.